경남 항공국가산업단지의 조기 완성

관리번호		2-4		주관부서		우주항공과(우주항공지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			20

◦ 항공국가산단 조성으로 항공산업 기본 인프라를 구축하고 나아가 항공산업 G7 진입 및 완제기 수출국으로의 도약을 위한 발판 마련

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 신촌리, 통양리, 선진리 일원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

◦ 사 업 량 : 산업단지 조성 A=819,400㎡

◦ 사업내용 : 중형민항기 완제품 및 관련 부품 생산 기지화

◦ 사 업 비(투자계획) : 201,200백만원 (공사비 79,000 보상비 122,200)

◦ 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	201,200	2,515	66,485	73,700	21,500	37,000
민자 등	201,200	2,515	66,485	73,700	21,500	37,000

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		25%	50%	75%	90%	100%
국가산단 조성	공사 착공					공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2014. 12월 : 국가산업단지 조성 확정 발표(국토부)

◦ 2017.  5월 : 경남 항공국가산업단지 승인 고시

◦ 2017.  8월 : 국가산단 상호협력 약정서 체결(도-시-LH)

◦ 2017. 12월 : 관리기본계획 고시

◦ 2018.  7월 : 협의보상 완료(8월말 수용재결 병행)

◦ 2018. 12월 : 조성공사 착수

◦ 2019.  2월 : 산업단지계획 변경 고시

◦ 2019.  6월 : 수용재결 완료(일부 누락필지 진행 중)

◦ 2019.  9월 : 환경·재해 영향평가 대상사업 착공통보서 제출

□ 향후 추진계획

◦ 2022.  1월 : 분양 시작

◦ 2022. 10월 : 조성공사 준공

◦ 2022. 12월 : 분양 완료

□ 문제점 및 대책

◦ 산업단지 준공 후 분양을 계획함에 따라 분양시기 지연

→ 공정관리를 통한 조기준공 및 부분준공을 통한 선 분양 유도

◦  산단공 수요조사 결과 국가산단 분양·임대 예상가격(120만원/평,40,000원/평·년)으로 수요가 저조할 것으로 예상

→ 항공핵심기업체 방문 등으로 투자유치 유도, 분양가·임대료 조정을 위하여          국비 등의 지원 건의

→ 입주업체 업종 탄력적 추가 등 적극 추진

◦ 이주대책 수립에 대한 주민과의 의견차이로 민원발생(이주단지 선분양 요구)

→ 이주단지 선 분양 추진 요청, 침수지역 11가구 편입 건의