삼천포 도시재생사업 확대

관리번호		3-15		주관부서		도시재생과(재생지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			25

◦ 도시재생공모사업을 통하여 자생적 성장기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고

하며, 지역 공동체를 회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 대방동 대방마을, 삼천포 중앙시장 인근

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

◦ 사 업 량

- 주거지지원형 사업 1식(대방마을)

- 일반근린형 사업 1식(중앙시장)

◦ 사업내용

대방마을(2018년 선정)	도시재생뉴딜사업 신규 신청
A-1 민간자율주거재생사업(순환형) A-2 골목길 정비(CPTED) A-3 생활 인프라 개선 B-1 굴항 역사공원 조성사업 B-2 해안공원 조성사업 B-3 해안로 수변보행로 정비 C-1 공유경제 플랫폼 조성사업 C-2 대방 게스트하우스 조성사업 C-3 먹거리 타운 운영 프로그램 사업 D-1 복합커뮤니티 센터 조성사업	◦ 2019년 선구·동서금동 지구 미선정(일반근린형) ◦ 2020년 공모사업 지속 신청 1식

◦ 사 업 비(투자계획) : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	15,000			3,600	3,720	3,840	3,840
국 비	9,000			2,160	2,232	2,304	2,304
도 비	1,800			432	446	461	461
시 비	4,200			1,008	1,042	1,075	1,075
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	90%	100%
대방굴항, 중앙시장 도시재생사업	계획수립 예산확보	활성화 계획승인 예산확보 공모사업선정	실시설계 사업시행	실시설계 사업시행 운영	사업시행	사업준공 운영

□ 연도별 달성목표

□ 기 선정사업 추진실적 및 향후계획(대방굴항, 주거지지원형)

◦ 2018.  8. 31. :‘18년 도시재생 뉴딜 공모사업『큰고을 大芳굴항(주거지지원형)』선정

◦ 2018. 10. 17. : 선도지역(주거지지원형) 지정을 위한 공청회 개최

◦ 2018. 11.  5. : 활성화계획(주거지지원형) 수립 용역 시행

◦ 2018. 12. 26. : 도시재생 선도지역(주거지지원형) 지정 고시

◦ 2019.  1. 23. : 활성화계획(주거지지원형) 수립을 위한 주민설명회 개최

◦ 2019.  2. 14. : 도시재생활성화계획(주거지지원형)에 대한 지방위원회심의

◦ 2019.  7. 10. : 활성화계획(안), 실현가능성 및 타당성평가 요청

◦ 2019.  9. 24. : 활성화계획 승인(국토부→사천시)

◦ 2019. 10월중 : 국도비 교부 및 사업시행

◦ 2022. 12월중 : 사업완료

□ 신청 예정사업 추진실적 및 향후계획

◦ 2019.  4.  5. : 선구·동서금동 도시재생활성화계획 수립용역 착수

◦ 2019.  8.  2. : 2019년 하반기 도시재생뉴딜사업 공모사업 신청

(선구·동서금동 지구 미선정)

◦ 2019. 10월 ~ : 2020년 공모사업 신청 계획