호복포항 개발사업

관리번호		3-4		주관부서		해양수산과(연안관리팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			20

◦ 어촌의 산업구조를 해양관광·레저 등으로 다변화 하고, 주민역량 강화를 통한 지속가능한 성장 토대를 마련

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동서동 호복포 일원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사 업 량 : 호복포항 외곽시설 L=200m, 해안연결도로 L=630m, 해안산책로 L=1,200m

◦ 사업내용 : 관광산업 활성화를 위한 호복포항 개발

◦ 사 업 비(투자계획) : 15,057백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	15,057		90	5,239	9,728
국 비	10,477			3,667	6,810
도 비	1,347			472	875
시 비	3,233		90	1,100	2,043

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	10%	50%	100%
호복포항개발계획 수립	계획수립
해안산책로조성, 항 외곽시설 정비, 해안 연결도로 정비		설계용역, 공사착공	공사준공, 시설운영

□ 추진실적

◦ 2018.  5월 : 호복포항 개발계획 수립용역 착수

◦ 2018. 10월 : 어촌뉴딜300사업 공모신청

◦ 2018. 12월 : 공모사업 선정

◦ 2019.  3월 : 기본 및 실시설계용역 발주

◦ 2019.  4월 ~ 9월 : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 10월 ~ 2020. 12월 : 행정절차 이행 및 공사추진

□ 문제점 및 대책

◦ 행정절차 이행 장기 소요로 사업지연 예상→실시설계와 병행 추진, 사업기간 단축