대포 피셔리나항 개발과 크루저요트 산업 활성화

관리번호		3-6		주관부서		해양수산과(해양레저팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			5

◦ 기존 어항시설을 활용 해양레저, 레크레이션 공간 등 어촌관광 기반시설을

갖춘 다기능어항으로 개발하여 부족한 해양레저 기반시설 확충

◦ 어업과 해양레저의 상생발전 도모로 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

◦ 위    치 : 대포동 대포항

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사 업 량 : 마리나시설 등 1개소

◦ 사업내용 : 요트 및 레저기구 정박시설 1식

◦ 사 업 비(투자계획) : 530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	530		30			500
국 비	250					250
도 비	75					75
시 비	205		30			175
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	15%	30%	100%
대포 피셔리나항 개발과 크루저요트산업 활성화	착공(타당성 조사 용역)	준공(타당성 . 조사 용역)	예산확보	착공	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018. 1월 : 조사용역비 확보

◦ 2018. 3월 : 대상어항 검토(지방어항)

◦ 2018. 9. 12. : 착공(타당성 조사 용역)

◦ 2019. 2.  8. : 대포마을 주민설명회 개최

◦ 2019. 2. 28. : 용역 일시중지

◦ 2019. 9. 10. : 타당성 조사용역 중간보고

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 11월 : 타당성조사 용역 준공

◦ 2020. 12월 : 예산확보

◦ 2021.  1월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계, 기타 행정절차이행, 공사 착공

◦ 2022.  6월 : 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 관내 대상어항 검토한 바 경남도 관리항인 지방어항의 위치, 수심, 면적 등이

타 어항보다 우수하여 지방어항 중 최적지로 선정코자 타당성 조사용역을 시행

중이나 대포마을 주민설명회 개최결과 어항 협소로 레저기구 정박시설 위치

선정 애로, 정박 가능 척수 제한, 어선과의 충돌사고 발생 우려 등으로 어항

내 설치 반대하며, 어항 외측에 별도 항만 구축의견 제시

◦ 레저기구 전용 항만 구축을 위한 위치선정 애로 및 경제성 부족 등으로 ｢어촌뉴딜

300사업｣과 연계한 호복포항 일원으로 위치 변경 필요

→‘호복포항(구.영복항) 개발계획 수립 용역’결과에 따라 타당성조사 용역

재개 및 주요사항 반영 추진