우천숲~용소간 산책로 설치

관리번호		5-12		주관부서		건설수도과(농업기반팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			10

◦ 지역 주민 및 자연발생 유원지 방문객의 편익 증진

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 사남면 우천리 1502번지 일원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사 업 량

- 산책로설치 : 콘크리트 포장(L=1,120m, B=3.0m), 보도교 설치 2개소, 쉼터 6개소

- 지방하천 정비 : L=400m, B=3.0m

◦ 사업내용 : 하천 제방 포장(보도교 설치) 및 지방하천 정비

◦ 사 업 비(투자계획) : 1,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	1,590			50	1,020	520
도 비	500				500
시 비	1,090			50	520	520

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		25%	100%	100%	100%
우천숲~용소간 산책로 설치	계획수립 예산확보	용역시행 공사시행	공사시행, 준공	정상운영	정상운영
죽천천(연천제) 정비		실시설계 및 보상	공사 착공, 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  7월 : 현장 확인 조사

◦ 2018.  8월 : 2019년 일반하천 정비사업 신청(경상남도)

◦ 2018. 11월 : 2019년 일반하천 정비사업 결과 통보(죽천천, 연천제 제외)

◦ 2019.  2월 : 실시설계용역 추진(농업기반),  재난특별기금 예산확보

◦ 2019.  4월 : 실시설계용역 완료

◦ 2019.  6월 : 행정절차 이행

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 10월 ~ 2020. 12월 : 우천숲 ~ 용소유원지간 산책로 설치공사 추진

◦ 2019. 8월 ~ 2020. 12월 : 죽천천(연천제) 정비-재난특별기금 사업 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 산책로 설치사업비(시비 590백만원)확보 애로→‘20년 농림사업신청 등 국‧도비 확보 노력