완사천 지방하천 정비

관리번호		5-13		주관부서		건설수도과(하천팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				O			5

◦ 하천 미 개수구간 정비로 홍수 피해 저감 및 사전 재해 예방

◦ 하천개수와 함께 자연과 생물이 되살아나는 시민들이 친숙한 하천 조성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 곤명면 마곡리 ~ 송림리(완사천 일원)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2024년

◦ 사 업 량 : L=1.3km

◦ 사업내용 : 지방하천 개수(축제 및 보축)

◦ 사 업 비(투자계획) : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	7,200				2,050	500	400	4,250
국 비	3,600				950	300	200	2,150
도 비	500				500
시 비	3,100				600	200	200	2,100

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)			10%	30%	50%	100%
하천정비사업			실시설계, 보상협의	공사착공	공사시행	완공

□ 추진실적

◦ 2018.  1월 : 완사천 하천기본계획 수립용역 착수(부산지방국토관리청)

◦ 2018.  7월 : 전략환경영향평가 초안 제출(부산청→낙동강유역청)

◦ 2018.  8월 : 주민설명회 개최(곤명면사무소)

◦ 2018. 10월 : 완사천 재해예방사업 시행 건의(사천시→경상남도)

◦ 2018. 11월 : 완사천 하천기본계획 수립용역 수립 중

◦ 2019.  3월 : 완사천 재해예방사업 시행 재건의(사천시→경상남도)

◦ 2019.  9월 : 완사천 재해예방사업 및 우선순위 조정건의

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 12월 : 완사천 하천기본계획 수립용역 준공

◦ 2020.  1월 ~ 2021.  1월 : 완사천 하천정비 실시설계 완료

◦ 2021.  6월 ~ 2024. 12월 : 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 하천기본계획(경상남도)이 수립된 하천 중 우선순위에 의거 사업추진

→ 관리청에 사업건의 및 공모사업 등을 통한 우선순위 조정 요청