실안휴양림 종합개발(숙박시설)

관리번호		5-7		주관부서		녹지공원과(공원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			20

◦ 편백림을 시민에게 정서함양과 보전휴양의 장소로 제공

◦ 사천바다 케이블카와 연계한 체류형 관광인프라 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 실안동 산170-2번지 외 25필지 일원(39.4ha)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

◦ 사업내용

- 숙박시설 : 산림휴양관 3동 6실, 숲속의 집 16동 16실

- 편익시설 : 방문자센터 1동, 야영센터 1동, 관리실 1동, 야영데크 15개소,

야외공연장 1식, 진입로 1식, 주차장 1식 등

- 위생시설 : 상수ㆍ오수시설 1식

- 체험ㆍ교육시설 : 산책로 3km, 숲속놀이터 1식, 숲속교실 1식,

다목적 구장 1개소, 계류탁족장 1개소 등

- 기타 : 전기ㆍ통신ㆍ신재생에너지 시설 등

◦ 소요사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	6,500		200	5,300	1,000
국 비	2,500		100	1,900	500
도 비	750		30	570	150
시 비	3,250		70	2,830	350
민자 등

※ 사천바다 케이블카 자연휴양림 조성사업으로 추진

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	70%	100%	100%	100%
케이블카 자연휴양림 조성	실시설계, 조성계획 승인 및 사업발주	공사추진	공사추진 및 준공	보완사업 추진	보완사업 추진

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017.  1. 15. : 휴양림 예정지 내 사유지 매입(24필지 177,047㎡) 완료

◦ 2017.  5. 17. : 휴양림 지정 고시(산림청 고시 제2017-48호)

◦ 2017.  7. 31. : 균특사업 반영(2018.~2020.)

◦ 2018.  4. 11. : 휴양림 조성사업 실시설계 완료

◦ 2018.  6. 29. : 휴양림 조성계획 승인(도지사)

◦ 2018.  6. 29. : 국유림 사용허가 신청

◦ 2018. 10월 ~ 12월 : 총괄사업 및 2018년분 사업 발주

◦ 2019.  1월   : 2019년분 사업 발주

◦ 2019.  6. 17. : 2018년분 사업 준공

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 12월 : 2019년 사업 준공

◦ 2020.  1월 : 2020년 사업 발주

◦ 2020. 12월 : 휴양림 조성사업 준공(총괄)

◦ 2021.  7월 ~  : 휴양림 시설 운영 및 시설 보완

□ 문제점 및 대책

◦ 본격적인 사업 추진을 위해 휴양림 진입 도시계획도로 개설 시급

- 총 연장 1,775m 중 마을 앞을 지나는 1단계 약 700m 구간 개설공사 선 시행

◦ 휴양림 개장과 도시계획도로 개설시기의 불일치에 따른 공공상․하수도망과의

연결 불가로 휴양림 내 상수 및 오수의 처리를 위한 추가사업 발생과 휴양림

개장 및 운영애로 불가피