국도3호선~금문해안도로간 연결도로 개설

관리번호		6-14		주관부서		도시과(도시계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			30

◦ 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급

◦ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 금문리 일원

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2022년

◦ 사 업 량 : L=896m, B=25m→15m

◦ 사업내용 : 연결도로 개설 L=896m, 25m→15m

◦ 사 업 비(투자계획) : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	7,000	1,550	500	500	2,000	1,000	1,000	450
도 비	750	750
시 비	6,250	800	500	500	2,000	1,000	1,000	450

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	29%	36%	65%	79%	94%	100%
도로 신설	토지보상	토지보상	토지보상 및 공사	공사착공	공사시행	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2013. 11월  : 투융자 심사

◦ 2015.  9월  : 손실보상협의(1차구간 : 국도3호선~금문마을방향 L=150m)

◦ 2017.  4월 : 손실보상 재산정 (토지 5, 지장물 3, 594백만원)

◦ 2017.  6월 ~ 2018.  2월 : 지장가옥(11동) 철거

◦ 2018.  1월 ~ 2019.  9월 : 보상 협의(2필지/5필지, 168백만원/594백만원)

◦ 2019.  2월 : 시의회 5분 자유발언 및 주민건의 등에 따라 노선폭원축소 검토보고

◦ 2019.  9월 : 폭원축소 계획 수립(B=25m→15m)

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 10월 ~ 2020.  6월 : 보상완료 구간(L=150m) 공사 추진

◦ 2020.  1월 ~ 2021.  6월 : 편입토지 보상 및 지장가옥 철거

◦ 2021.  7월 ~ 2022. 12월 : 잔여구간(L=746m) 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 2015년부터 국도3호선~기존 금문마을도로 L=140m구간에 대한 보상이 진행 중에 있으나, 시 재정여건상 사업의 장기화가 불가피하며, 사업의 장기화로 토지보상비 및 공사비 증가 등이 예상  → 도로 폭원 축소하여 사업 추진