시도 확․포장 추진

관리번호		6-19		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

◦ 이용객의 편익 증대 및 교통혼잡 해소를 위한 교통소통대책 실시

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사남면 유천 ~ KAI간 등 5개소

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사 업 량

- 유천 ~ KAI간(시도12호선) : L=700m, B=15m

- 양동마을앞(시도3호선) : L=570m, B=15m

- 원전 ~ 마곡간(시도19호선) : L=1,300m, B=6m→8m

- 감곡(시도9호선) : L=1,700m

- 대곡 ~ 구암간(시도22호선) : L=3,500m

◦ 사업내용 : 시도 확․포장

◦ 사 업 비 : 10,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	10,265	576	684	1,275	2,950	2,350	2,430
시 비	10,265	576	684	1,275	2,950	2,350	2,430

□ 연도별 달성목표

단위명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022. 6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	50%	100%
유천~KAI간 (시도12호선)			도로구역 변경	공사 착공 및 준공
양동마을앞 (시도3호선)	도로구역 결정	보상	공사 착공 및 준공
원전~마곡간 (시도19호선)	실시설계	공사 착공 및 준공
감곡 (시도9호선)			실시설계 및 도로구역결정	보상 및 착공	준공
대곡~구암간 (시도22호선)	구간별 실시 설계 및 도로 구역결정	구간별 보상 및 공사	구간별 보상 및 공사	구간별 보상 및 공사	구간별 보상 및 공사

□ 추진실적

◦ 2018.  3월 : 양동마을 앞 실시설계

◦ 2018.  5월 : 원전~마곡 실시설계

◦ 2018. 12월 : 양동마을 도로구역결정 고시

◦ 2019.  2월 : 원전~마곡 착공

◦ 2019.  3월 : 양동마을 보상

◦ 2019.  9월 : 원전~마곡 준공

□ 향후 추진계획

◦ 유천 ~ KAI간(시도12호선)

- 2020. 1월 : 도로구역 변경 및 도로관리청이 아닌자의 공사 시행

- 2021. 12월 : 공사 준공

◦ 양동마을앞(시도3호선)

- 2019.  9월 ~ : 추경 확보 후 보상

- 2020.  1월 ~ 2020. 12월 : 공사 착공 및 준공

◦ 원전 ~ 마곡간(시도19호선)

- 2019. 10월 : 준공시설물 인수 인계

◦ 감곡(시도9호선)

- 현재 국지도 33호선 ~ 감곡마을회관까지 확장완료

- 잔여구간에 대하여 추진

◦ 대곡 ~ 구암간(시도22호선)

- 구간별 보상 및 사업추진 중