향촌지역 일반산업단지 조성

관리번호		6-25		주관부서		산단관리과(산단조성팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○						○	5

◦ 중장기 계획에 따라 지역 특성과 역량에 맞는 산업단지 조성을 통하여 지역 균형 발전과 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 향촌동 일원

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 임기후

◦ 사업내용 : 780,000㎡

◦ 유치업종 : 기타 기계 및 장비 제조업(C29),  기타 운송장비 제조시설(C31)

◦ 사 업 비(투자계획) : 210,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	210,000					200	3,000	206,800
국 비
도 비
시 비	105,000					200	3,000	101,800
지방채	105,000							105,000

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)			10%	20%	30%	100%
단지계획 수립 고시			타당성조사	산업단지계획 수립 용역	산업단지계획 승인 고시	공사착공

□ 추진실적

◦ 2016.  5. 11. : 2030 사천 도시기본계획 승인(공업용지 7.62㎢ 확보)

◦ 2018.  9.  1. : 시장공약사업 세부추진계획 수립

□ 향후 추진계획

◦ 2020.  1월 : 타당성 검토 및 행정절차 이행

□ 문제점 및 대책

◦ 향촌2일반산업단지 외 5개소(용당MRO, 송포첨단, 서부산단, 사천항공, 선진산단) 산업단지를 추진(2,901,107㎡ 5,522억원)중으로 시비 및  지방채 부담 가중

→ 주변 산업단지 추이를 감안하여 향후 타당성 검토 등 행정절차 이행