지능형 디지털 아쿠아리움 투자유치

관리번호		3-13		주관부서		관광진흥과(관광개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			60

◦ 사천바다 케이블카와 연계한 아쿠아리움 조성으로 해양관광거점 도시로써의 관광인프라 확충 필요

□ 사업개요

◦ 사업위치 : 사천시 늑도동 일대

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사업내용 : 아쿠아리움, 지역역사관 건립

◦ 사 업 비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	18,100			2,600	13,000	2,500
국 비
도 비
시 비	600			600
민자 등	17,500			2,000	13,000	2,500

□ 연도별 추진목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	40%	90%	100%
아쿠아리움 조성	민자유치	착공	건축공사	공사완공 및 운영

□ 추진실적

◦ 2018. 11.

- 민선7기 공약이행을 위한 민간투자유치 합동설명회

- 민선7기 시장공약 민간투자사업 추진절차 검토보고

- 수익형 민간투자사업 민간부분 사업제안 안내

◦ 2018. 12. : 수익형 민간투자사업 민간부문사업 제안

◦ 2019.  1.

- 민간부문사업제안에 대한 검토보고

- 제1차 정기 지방재정 투자사업 심사의뢰서 제출

- 2019년 제1회 공유재산심의회 안건 제출

◦ 2019.  2. : 초양도 아쿠아리움 설치를 위한 도시관리계획 결정(변경)의뢰

◦ 2019.  3.

- 민선7기 시장공약 아쿠아리움 건설 추진계획 보고

- 사천 아쿠아리움 민간투자 사업제안서 공모공고

◦ 2019.  4.

- 초양도 아쿠아리움 건립 협상대상자 지정 및 통보[(주)애니멀킹덤]

◦ 2019.  5.

- 사천시 도시계획위원회 개최(조건부 수용)

- 실시협약 체결[(주)애니멀킹덤]

◦ 2019.  6.

- 제2차 정기 경상남도 지방재정 투자심사위원회 개최

- 제2차 정기 경상남도 지방재정 투자심사 결과 통보(재검토)

◦ 2019.  7.

- 초양도 아쿠아리움 건립 타당성 검토 용역 시행

◦ 2019.  8.

- 제3차 경상남도 지방재정투자심사 심의자료 제출(시->경남도)

◦ 2019. 10.

- 제3차 지방재정투자심사 위원회 개최 → 조건부추진(2단계심사)

- 건축허가(도시계획시설사업 시행자지정 및 실시계획인가)

- 도시관리계획시설(문화공원, 도로)사업 실시계획인가 고시

- 공유재산 사용·수익허가

◦ 2019. 11.

- 수시 경상남도 지방재정투자심사 심의자료 제출(시->경남도)

◦ 2019. 12.

- 실시협약 변경 체결

◦ 2019. 12. 23. : 수시 경상남도 지방재정 투자심사위원회 개최

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 12월말 : 공사착공

◦ 2021. 4월 중 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 지방재정부담 손실 방지를 위해 실시협약을 이행하고 2단계 심사 필요

◦ 지방재정투자심사 승인을 위해 시 재정부담 방지를 위한 실시협약 변경 체결