고등학교 기숙사 건립 지원

관리번호		4-2		주관부서		평생학습센터(교육지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

◦ 동지역 고등학교 기숙사 건립 육성지원을 통한 교육여건개선으로 지역인재 양성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 삼천포고등학교(사천시 벌리6길 77 일원)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

◦ 사 업 량 : 지상 4층, 연면적 2,360㎡

◦ 사업내용 : 고등학교 기숙사 및 다목적 훈련실 건립 지원

◦ 사 업 비(투자계획) : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	5,100			165	3,935	1,000
국 비	2,500			65	1,435	1,000
시 비	2,500			100	2,400
민자 등	100				100

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	90%	100%
기숙사 및 다목적 훈련실 건립	투자심사	설계실시	공사착공	준공

□ 추진실적

◦ 2017.  8. : 기숙사 건립 건의 요청 및 세부추진계획 수립

◦ 2018.  4. : 총사업비(51억)의 市 대응투자비 25억 확약서 발급

◦ 2018. 10. : 2019년 당초예산 확보,: 경남도교육청 투자심사(특별교부금 25억)

◦ 2018. 11. : 시 자체 투자심사(시 총지원액 25억)

◦ 2019.  3. : 교육부 투자심사 결과 회신에 따라 지원 예정

◦ 2019.  4. : 경남도 교육청 지역교육 현안 특별교부 사업으로 확정

◦ 2019.  6. : 사업추진 실적에 따른 설계용역비(1억원) 교부

◦ 2019.  7. : 설계용역 착수

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 12. ~ 2020. 2. : 설계용역 변경

◦ 2019. 3. ~ 2021. 2. : 건축업체 선정 및 건축공사 시행

◦ 2021. 3. : 준공 및 기숙사 학생 수용 관리

□ 문제점 및 대책

◦ 공사 진행에 따라 시 지원금 교부