신수도 생태관광 자원화

관리번호		5-16		주관부서		도시재생과(균형발전팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			10

◦ 낙후된 도서지역 주민의 소득증대 및 삶의 질 향상

◦ 한려해상의 수려한 관광자원을 활용한 섬 관광 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 신수동 일원

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

◦ 사 업 량 : 관광지 조성 1식, 부잔교 L=280m, 유어장 6개, 탐방로 L=27km

◦ 사업내용 : 신수도 생태관광지 조성

◦ 사 업 비(투자계획) : 3,428백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	3,428			60	1,526	1,026	816
국 비	2,743			48	1,221	821	653
도 비	342.5			6	152.5	102.5	81.5
시 비	342.5			6	152.5	102.5	81.5
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)		10%	50%	80%	100%
신수도 부잔교 설치		실시설계	공사 착공, 공사 준공
신수도 관광지 조성			실시설계, 공사 착공	공사 진행	공사 준공
신수도 유어장 설치			실시 설계, 공사 착공	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2016. 10. 21. : 제4차 도서종합개발계획(2018.~2027.) 사업계획 제출

◦ 2018.  3. 30. : 제4차 도서종합개발계획(2018.~2027.) 확정

◦ 신수도 부잔교 설치

- 2019.  1. : 실시설계용역 발주

- 2019.  3. : 실시설계 완료

- 2019.  4. : 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

- 2019.  4. : 공유수면 점용·사용 승인

- 2019. 10. : 공유수면 점용·사용 실시계획 신고

□ 향후 추진계획

◦ 신수도 부잔교 설치

- 2020.  1. ~ 2020. 12. : 공사 착공 및 준공

◦ 신수도 관광지 조성

- 2020.  3. : 실시설계 발주

- 2020.  9. : 실시설계 완료, 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

- 2020. 10. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공

※ 해양수산부 시행□신수항 친수공간 조성사업□과 연계(신수동 137-5번지 일원)

◦ 신수도 유어장 설치

- 2020.  3. : 실시설계 발주

- 2020.  5. : 실시설계 완료, 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

- 2020.  6. ~ 2021. 6. : 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 둘레길 및 유어장 설치 등 한려해상국립공원 구역내 행위허가 불가함

→ 환경부 및 국립공원관리공단과 지속적인 협의 추진