발전소 우회도로 조기 개설

관리번호		6-1		주관부서		기획예산담당관(기획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			30

◦ 화력발전소 추가 건설에 따른 물동량 증가로 배후도로 개설 필요

◦ 시민안전 위해요소 제거 및 시가지 교통난 해소

□ 사업개요

◦ 위    치 : 삼천포도서관 뒤 ~ 용강정수장 ~ 구.향촌농공단지 진입로 입구

◦ 사 업 량 : L=4.3㎞, B=35m

◦ 사업내용 : 우회도로 개설

◦ 사 업 비(투자계획) : 75,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	75,900			1,200	20,000	24,700	15,000	15,000
시 비	40,100			1,200	20,000	18,900
민자 등	35,800					5,800	15,000	15,000

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	60%	80%	100%
우회도로 개설		실시설계용역	토지보상	토지보상 및 공사착공	공사시행	완공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2015.  7. ~ 2019. 2. 14. : 발전소 우회도로 개설 협상 T/F팀 협의 12회

◦ 2019.  2. ~ 12. : 실무협상 수시 개최

◦ 2019.  3. ~ 12. : 사천시장, GGP사장 대표자 협상 5회

◦ 2019.  6. : 발전소 우회도로 실시설계 용역 착수

◦ 2019. 12. 4. : 발전소 우회도로 개설 협약 체결

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 1. ~ : 발전소 우회도로 개설 실무협의회 수시 개최

◦ 2020. 7. ~ : 토지보상 및 공사시행