삼천포 도시재생사업 확대

관리번호		3-15		주관부서		도시재생과(재생지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			30

◦ 도시재생공모사업을 통하여 자생적 성장기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고

하며, 지역 공동체를 회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 대방동 대방마을, 활성화 지구 내

◦ 사업기간: 2019년~2022년

◦ 사 업 량

- 주거지지원형 사업 1식(대방마을)

- 도시재생사업 신규 신청

◦ 사업내용

대방마을(2018년 선정)	도시재생뉴딜사업 신규 신청
A-1 자율주택정비사업 A-2 생활 인프라 개선사업 B-1 굴항공간 재생사업 B-2 해안공원 조성사업 C-1 공유경제 플랫폼 조성사업 C-2 대방 모두자리 조성사업 C-3 주민소규모 창업공간 지원 D-1 복합커뮤니티 센터 조성사업 D-2 주민제안 공모 및 주민역량 강화사업	◦ 도시재생 공모사업 지속 신청

◦ 사 업 비(투자계획): 15,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	15,000			1,281	6,039	3,840	3,840
국 비	9,000			1,251	3,141	2,304	2,304
도 비	1,800			0	878	461	461
시 비	4,200			30	2,020	1,075	1,075
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	90%	100%
큰고을 대방 굴항 도시재생사업	공모사업선정	활성화계획 승인, 실시설계, 사업시행	실시설계 사업시행	실시설계 사업시행 운영	사업시행	사업준공 운영
도시재생사업 신규 신청		선구·동서금동 도시 재생뉴딜 미선정	소규모 재생 사업 신청

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

〈큰고을 대방 굴항 도시재생사업〉

◦ 2018.  8. 31.:‘18년 도시재생 뉴딜 공모사업『큰고을 大芳굴항(주거지지원형)』선정

◦ 2018. 10. 17.: 선도지역(주거지지원형) 지정을 위한 공청회 개최

◦ 2018. 11.  5.: 활성화계획(주거지지원형) 수립 용역 시행

◦ 2018. 12. 26.: 도시재생 선도지역(주거지지원형) 지정 고시

◦ 2019.  1. 23.: 활성화계획(주거지지원형) 수립을 위한 주민설명회 개최

◦ 2019.  2. 14.: 도시재생활성화계획(주거지지원형)에 대한 지방위원회심의

◦ 2019.  7. 10.: 활성화계획(안), 실현가능성 및 타당성평가 요청

◦ 2019.  9. 24.: 활성화계획 승인(국토부→사천시)

◦ 2019. 11월말: 복합커뮤니티센터, 대방모두자리 보상 및 설계용역 발주,

도시재생대학 운영

◦ 2020.  2.  6.: 도시관리계획 결정(변경) 승인 고시

◦ 2020.  3. 30.: 굴항공간재생사업 보상 공고

◦ 2020.  4. 24.: 복합커뮤니티센터 조성부지 철거공사 완료

◦ 2020.  5월중: 생활인프라 개선사업, 대방모두자리조성 설계용역 준공

◦ 2020.  6월중: 생활인프라 개선사업(클린하우스 조성공사, 도장공사) 시행

〈도시재생사업 신규 신청>

◦ 2019.  4.  5.: 선구·동서금동 도시재생활성화계획 수립용역 착수

◦ 2019.  8.  2.: 2019년 하반기 도시재생뉴딜사업 공모사업 신청(미선정)

□ 향후 추진계획

〈큰고을 대방 굴항 도시재생사업〉

◦ 2020.  7월중: 생활인프라 개선사업(클린하우스 조성공사, 도장공사) 준공

◦ 2020.  8월중: 복합커뮤니티센터 설계용역 준공 및 건축공사 착공

◦ 2020. 11월중: 해안공원 조성사업 보상실시

◦ 2022. 12월중: 사업완료

〈도시재생사업 신규 신청>

◦ 2020. 4.~: 도시재생사업 공모 신청