바다마실, 삼천포 愛 빠지다’차질없는 추진

관리번호		3-16		주관부서		도시재생과(재생지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			40

◦ 기 선정된 도시재생공모사업을 통하여 자생적 성장기반을 확충하고 도시경쟁력을 제고하며 지역공동체를 회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 삼천포용궁시장 일원

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사 업 량: 도시재생사업(중심시가지형) 1식

◦ 사업내용

A-1 ‘블루웨이’ 통합경관 조성	B-1 어시장길 특성화
A-2 삼천포 전통수산시장 개방공간 조성	B-2 시장지원 거점 조성
A-3 바다조망테라스 조성	B-3 복합문화공간 조성
A-4 방파제 파도공원	B-4 청년문화에비뉴 조성
	B-5 인포메이션 거점 조성
C-1 파랑마을 정비사업	D-1 복합커뮤니티 7004 조성
C-2 문화오름 설치	D-2 청널공원 주민거점화
C-3 삼천포 커뮤니티 에코주차장 조성

◦ 사 업 비(투자계획): 30,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	30,000		334	5,804	7,900	7,981	7,981
국 비	15,000		182	5,581	3,289	2,974	2,974
도 비	3,000		3	20	1,035	971	971
시 비	12,000		149	203	3,576	4,036	4,036

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	90%	100%
삼천포구항 도시재생사업	계획수립 예산확보	실시설계 협의체구성	실시설계 사업시행	실시설계 사업시행 운영	사업시행	사업준공 운영

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  5.  8.: 선도지역 지정 고시(국토부)

◦ 2018.  7. 31.: 활성화계획 승인완료

◦ 2018.  9. 20.: 국도비 보조금 교부

◦ 2018. 11. 27.: 사천시 도시재생현장지원센터 홈페이지 개설

◦ 2018. 12.: 7004 복합교류공간 공사착공(건축/기계, 통신, 전기)

◦ 2019.  1.

- 도시재생 복합교류공간 폐기물처리 및 철거공사 발주

- 도시재생 복합교류공간 굴뚝 ART 디자인 용역 발주

- 삼천포구항 도시재생 사이트브랜딩 용역 발주

- 청널마을 문화오름 설치사업 기본구상 용역발주

◦ 2019.  3.  7.: 삼천포 커뮤니티 에코주차장 설치 건축설계 용역 발주

◦ 2019.  6.

- 블루웨이 통합경관 조성사업 실시설계 용역 발주

- 청널마을 문화오름 설치사업 실시설계용역 발주

- 도시재생 복합교류공간 준공

◦ 2019.  9.

- 삼천포구항 도시재생 커피 바리스타 교육 및 도시재생대학 운영

- 청널마을 문화오름 설치사업 보상협의

◦ 2019. 12.

- 어시장길 특성화사업, 에코주차장, 방파제 파도공원 조성공사 발주

◦ 2020.  3.

- 청널공원 내 공원휴계시설 실시설계용역 발주

- 복합문화공간 및 시장지원거점시설 실시설계용역 발주

- 청년문화에비뉴(도시재생 어울림 플랫폼) 실시설계용역 발주

- 사천도시관리계획(시설:청널공원) 공원조성계획 결정(변경) 용역 발주

◦ 2020.  5.

- 방파제 파도공원 정비사업 준공

- 어시장길 특성화사업 시설물 설치완료

□ 향후 추진계획

◦ 2020.  8월중: 청널마을 문화오름 설치사업 공사 착공

블루웨이 통합경관 조성사업 착공

청널공원 내 공원휴계시설 착공

복합문화공간 및 시장지원거점시설 착공

청년문화에비뉴(도시재생 어울림 플랫폼) 착공

◦ 2020.  9월중: 삼천포커뮤니티 에코주차장 조성공사 준공

◦ 2020. 12월중: 청널마을 문화오름 설치사업 공사 준공

청널공원 내 공원휴계시설 준공

복합문화공간 및 시장지원거점시설 준공

청년문화에비뉴(도시재생 어울림 플랫폼) 준공

◦ 2022. 12월중: 사업완료