고등학교 기숙사 건립 지원

관리번호		4-2		주관부서		평생학습센터(교육지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			30

◦ 동지역 고등학교 기숙사 건립 육성지원을 통한 교육여건개선으로 지역인재 양성

□ 사업개요

◦ 위    치: 삼천포고등학교(사천시 벌리6길 77 일원)

◦ 사업기간: 2019년~2021년

◦ 사 업 량: 지상 4층, 연면적 2,564㎡

◦ 사업내용: 고등학교 기숙사 및 다목적 훈련실 건립 지원

◦ 사 업 비(투자계획): 5,100백만원

(단위: 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	5,100			2,500	1,600	1,000
국 비	2,500			2,500
시 비	2,500				1,500	1,000
민자 등	100				100

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	90%	100%
기숙사 및 다목적 훈련실 건립	투자심사	설계실시	공사착공	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017.  8.: 기숙사 건립 건의 요청 및 세부추진계획 수립

◦ 2018.  4.: 총사업비(51억)의 市 대응투자비 25억 확약서 발급

◦ 2018. 10.: 2019년 당초예산 확보,: 경남도교육청 투자심사(특별교부금 25억)

◦ 2018. 11.: 시 자체 투자심사(시 총지원액 25억)

◦ 2019. 4.: 경남도교육청 지역교육현안 특별교부사업 확정

◦ 2019. 6.: 시 보조금 교부(1억 원)

◦ 2019. 7.: 경남도교육청 사업비 교부(25억 원)

◦ 2019. 8.: 설계용역(건축·토목·기계설비, 전기·통신·소방) 계약

◦ 2019. 12.: 설계용역 변경 계약

- 태권도실 외부 배치, 실 배치 조정 등 기본계획안 변경

◦ 2020. 2.: 설계용역기간 연장으로 ‘19년 미집행 교부금 1억 원 반납

◦ 2020. 6.: 설계용역 변경 완료

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 7.: 설계용역 도교육청 승인

◦ 2020. 8.~2021. 2.:공사 시행

◦ 2020. 10.: 2021년 당초예산 1,000백만원 반영

◦ 2021. 3.: 기숙사 학생 수용 및 운영

□ 문제점 및 대책

◦ 공사 진행에 따라 시 지원금 교부