수양공원 힐링 숲 조성

관리번호		5-6		주관부서		녹지공원과(공원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			50

◦ 시 공원 정비 및 조성을 통한 쾌적한 시민휴식공간 제공, 시의 관광이미지 제고

◦ 장기미집행 도시공원 해소로 과도한 사유권 제한 등에 따른 민원 해소

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 사천읍 정의리 172번지 일원

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사 업 량: 60,729㎡ 중 미조성지 5,179㎡

◦ 사업내용: 공원부지 매입 및 공원 조성

◦ 사 업 비(투자계획): 2,370백만원

(단위: 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	2,370		210	90	500	1,020	550
시 비	2,370		210	90	500	1,020	550

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	10%	20%	50%	70%	100%
수양공원 힐링 숲 조성	도시계획시설 재정비 및 단계별 집행계획 반영, 토지매입	공원조성계획수립(변경) 및 도시계획시설 조성사업 실시설계	토지매입 행정절차, 실시설계	토지매입	토지매입, 공사 착공 및 준공

□ 추진실적

◦ 전체 공원면적 75,511㎡ 중 59,495㎡ 조성(78.8%)

- 수양공원 꽃무릇 등 야생화 식재사업

- 공원 산책로변 비비추 등 초화류 식재사업, 공원부지 매입 : 2필지 1,081㎡

◦ 2018. 12. 31.: 도시과의「도시계획시설 재정비 및 단계별 집행계획 수립 용역」과

연계 단계별 집행계획 반영

◦ 2019. 5. 8.: 공원 내 편백나무(5년생) 식재 250본, 북문 주차장 조성(14면) 공사 준공

◦ 2019. 7. 1.: 북문 주차장 조경공사 준공

◦ 2020. 5. 14.: 도시계획시설(수양공원) 실시계획인가 고시

□ 향후 추진계획

◦ 2020.~2021.: 조성부분 토지 매입 및 관련 행정절차 이행

◦ 2020. 7. 1.: 조성불요 부분 실효(공원구역 조정)

◦ 2022.: 공원 조성

□ 문제점 및 대책

◦ 공원구역 선택적 조성 및 불요부분 실효 추진