농촌중심지 활성화 사업

관리번호		6-21		주관부서		도시재생과(농촌개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			60

◦ 정주서비스 기능 충족과 중심거점 공간 육성으로 주민의 삶의 질 향상

◦ 농촌 인구유지 및 생활환경 개선을 위한 기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 사천읍, 용현면, 곤명면 일원

◦ 사업기간: 2016년~2021년

◦ 사 업 량: 사천읍 사천활력거점센터 등 4개소, 용현면 길쌈두레문화관 등 6개소,

곤명면 다솔문화센터 등 8개소

◦ 사업내용: 기초생활기반 확충, 지역경관 개선, 지역역량 강화

◦ 사 업 비(투자계획): 19,197백만원

(단위: 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	19,197	3,099	2,947	5,481	4,190	3,830
국 비	13,438	2,170	2,062	3,837	2,933	2,786
도 비	1,728	278	266	494	377	313
시 비	4,031	651	619	1,150	880	731
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율 (누계)	25%	50%	75%	100%
사천읍	기본계획수립‧고시	시행계획 용역 추진	시행계획수립‧고시 및 공사착공	공사준공
용현면	기본계획수립‧고시	시행계획 용역 추진	시행계획수립‧고시 및 공사착공	공사준공
곤명면	공사착공	공사시행	공사시행	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

〈사천읍 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2017. 9.: 2018년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 4.: 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 6.: 시행계획 수립 용역 착수

◦ 2020. 06월까지: 시행계획 수립 및 고시를 위한 경남도 협의

<용현면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2017. 9.: 2018년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 3.: 위․수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사)

◦ 2019. 5.: 기본계획 수립 고시

◦ 2019. 9.: 시행계획 수립 착수

◦ 2020. 06월까지: 시행계획 수립 용역 정상 추진 및 추진위 협의

<곤명면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2017. 3. 16.: 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 5. 04.: 기본계획 변경 수립 고시

◦ 2018. 6. 07.: 시행계획 수립 고시

◦ 2018. 8. 29.: 공사 착공

◦ 2020. 06월까지: 공사 정상 추진

□ 향후 추진계획

<사천읍 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2020. 7월: 시행계획 수립 고시

◦ 2020. 8월: 공사 착공

◦ 2021. 12.: 공사 준공

<용현면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2020. 8월: 시행계획 수립 고시

◦ 2020. 9월: 공사 착공

◦ 2021. 12.: 공사 준공

<곤명면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2021.  2.: 사업 준공