사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립

관리번호		1-12		주관부서		문화체육과(체육시설팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			18

◦ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

□ 사업개요

◦ 위    치: 정동면 예수리 405번지 일원(항공우주테마공원 지내)

◦ 사업기간: 2020년~2023년

◦ 사 업 량: 생활밀착형 체육센터 및 생활문화센터 건립 1개소

◦ 사업내용: 수영장, 헬스장, 다목적체육관, 생활문화센터, 부대시설 등

◦ 사 업 비(투자계획): 13,000백만 원

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	13,000			20	1,910.8	5,700	5,369.2
국 비	4,600				1,567	1,467	1,566
도 비	750				200	200	350
시 비	7,650			20	143.8	4,033	3,453.2

(단위: 백만 원)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.	임기후
추진율(누계)		10%	20%	50%	80%	100%
실내수영장 건립		부지선정, 행정절차이행, 공모신청 사업확정, 연차별 사업비 확보	설계공모, 실시설계	착공	공사 중	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017.  9. 25.: 사천선인 공공주택지구내 공공시설 의견 회신(→건축과)

◦ 2018.  4. 18.: 지구계획 승인 협의 회신(체육부지 위치 변경 건의)

◦ 2018. 10. 12.: 실내수영장 조기착공을 위한 협의(LH한국토지주택공사)

◦ 2018. 10.~12.: 실내수영장 건립을 위한 부지 협의(국방부, 제3훈비)

◦ 2019.  1.: 2019년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청

◦ 2019.  3.~4.: 사천읍 실내수영장 건립사업 위치 검토 및 위치 변경

◦ 2019.  5.: 사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립 기본계획용역 시행

◦ 2019. 10.: 2020년 생활SOC복합화 공모사업 선정, 공유재산심의 완료

◦ 2019. 11.: 공유재산관리계획승인, 경남도 지방재정투자심사 심의,

사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립 기본계획용역 준공

◦ 2019. 12.: 중기지방재정계획 수립, 2020년도분 예산(국비, 시비) 확보

◦ 2020.  2.: 공공건축 사업계획 사전검토 완료

◦ 2020.  3.: 국유재산 매수신청

◦ 2020.  3.: 기본 및 실시설계용역 일상감사 검토 완료

◦ 2020.  3.: 기본 및 실시설계용역 도 계약심사 검토 완료

◦ 2020.  4.: 지질조사용역 완료

◦ 2020.  4.: 공공건축위원회 심의 완료

◦ 2020.  4.: 설계공모 조달청 계약요청

◦ 2020.  6.: 건축설계공모 입찰공고

◦ 2020.  8.: 건축설계공모 설계공모 심사 완료

◦ 2020.  9.: 건축실시설계 용역 착수

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  5.: 공사착공

◦ 2023.  3.: 공사준공

◦ 2023.  5.: 개관

□ 문제점 및 대책

◦ 완벽한 건축을 위한 실시설계 이행 철저