재래시장 종합정비 및 주차장 확보

관리번호		1-16		주관부서		지역경제과(지역경제팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			70

◦ 전통시장을 방문하는 이용객들의 주차장 확보로 지역경제 활성화 기여

◦ 시설현대화사업 및 활성화사업을 완료하여 방문객들의 편리한 이용을 도모

하고 청결한 전통시장 이미지 제고

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 일원

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사업내용: 재래시장 종합정비, 주차장확보

◦ 사 업 비(투자계획): 8,219백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	8,219	970	1,362	1,836	2,831	720	500
국 비	672		252	178	242
도 비	935		50	50	435	200	200
시 비	6,612	970	1,060	1,608	2,154	520	300
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	20%	40%	70%	80%	100%
시설개선 및 현대화사업	국비확보 후 사업시행	계속	계속	계속	계속
전통시장 활성사업	시설개선 및 확충사업	계속	계속	계속	계속
전통수산시장 주차장 조성	부지매입	부지매입	부지매입
사천읍시장 주차장 조성		농촌중심지 활성화사업 진행	농촌중심지 활성화사업 진행

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

< 전통시장 시설현대화사업 및 활성화사업 >

◦ 2018년도 시설현대화사업: 사천읍시장 CCTV설치 외 8건

◦ 2018년도 활성화사업: 전통시장 노후시설 보수 외 8건

◦ 2019년도 시설현대화사업: 완사시장 사무실 상인교육 공간 보수 외 2건

◦ 2019년도 활성화사업: 전통시장 노후시설 보수 외 5건

◦ 2020년도 시설현대화사업

- 2020.  3.: 2021년 시설현대화사업 공모 신청(사천읍시장 옥상방수 외 9건)

- 2020.  3.: 삼천포전통수산시장 CCTV 설치 완료

- 2020.  5.: 완사시장 외벽 환경정비 완료

- 2020.  6.: 곤양종합시장 소방시설 정비 완료

- 2020.  8.: 사천읍시장 천장아케이드 보수공사 완료

◦ 2020년도 활성화사업

- 2020.  4.: 곤양종합시장 및 용궁포차촌 화장실 보수 완료

- 2020.  6.: 완사시장 옥상방수공사 완료

- 2020.  6.: 삼천포중앙시장 간판설치공사 완료

- 2020.  9.: 전통시장(읍시장, 중앙시장) 개별점포 노후전선 정비사업 실시설계 완료

- 2020.  9.: 삼천포중앙시장 판매대 설치공사 완료

< 전통수산시장 주차장 조성 >

◦ 2017. 10.: 전통수산시장 주차장 실시계획인가 고시

◦ 2019. 12. ~ 2020. 9.: 에코주차장 조성 착공 및 준공(도시재생과 진행)

◦ 2020.  7월 기준.: 부지 매입(8동 중 5동 보상완료, 3동 수용재결 및 협의보상 병행 진행)

◦ 2020.  7월 기준.: 건물 철거(8동 중 3동 철거완료)

< 사천읍시장 주차장 조성 >

◦ 도시재생과 ‘사천읍 농촌중심지 활성화사업’으로 진행

◦ 2016. 9.: 2017년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 4.: 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 6.: 시행계획 수립 용역 착수

◦ 2020. 8.: 기본계획 변경 및 시행계획 수립 고시

□ 향후 추진계획

◦ 매년: 국비확보를 위한 시설현대화사업 및 각종 보조금 사업 신청

◦ 2020. 12.: 전통시장 시설현대화사업 및 활성화사업 완료

◦ 2020. 12.: 전통수산시장 주차장 조성부지 건물 2동 철거

◦ 2021.   : 전통수산시장 주차장 부지매입 완료

□ 문제점 및 대책

◦ 재래시장 종합정비는 상인들의 요구와 예산이 많이 소요되고 있으나 예산 투입에 비해 성과는 미흡

◦ 주차장 확보는 많은 시간과 예산이 소요

◦ 기 시행중인 전통수산시장 주차장 조성은 조속히 보상완료 후 철거공사 진행