어시장길·서부시장길 교통흐름 개선

관리번호		3-7		주관부서		민원교통과(교통지도팀)/ 도시과, 도시재생과, 지역경제과
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			65

◦ 어시장길·서부시장길 주변 불법 보도점거 및 주·정차행위 지도단속, 주차장과

도로 확포장을 통한 교통흐름 개선으로 통행불편 최소화

□ 사업개요

◦ 위    치: 어시장길, 서부시장길

- 어시장길: 삼양급수∼청미복집(500m)

- 서부시장길: 콜핑∼청미복집(530m)

◦ 사업기간: 2018년∼2021년

◦ 사 업 량: 주차금지 규제블럭 설치 등 7개

◦ 사업내용

- 주차금지 규제블럭 설치 1식

- 삼천포커뮤니티 에코 주차장 설치 및 삼천포전통수산시장 주차장 확장

- 도시계획도로 확․포장(8m → 15m)

- 시내버스 정류소 이전 및 택시 승강장 설치

- 어시장길 보도 확보 등

◦ 사업비(투자계획): 9,420백 만원

(단위 : 백 만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	11,520	590	668	3,936	4,226	2,100
국 비	2,460			1,200	1,260
도 비	492			240	252
시 비	8,568	590	668	2,496	1,588	2,100
민자 등

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	10%	70%	90%	100%
서부시장길 주차 금지 규제블럭 설치	공사 준공
수협활어센터~ 서부주차장 간 도시계획도로 개설	토지수용	공사 착공	공사 준공
삼천포전통수산시장 주차장 확장	토지수용	부지매입	부지매입	부지매입
삼천포커뮤니티 에코주차장 설치	행정절차이행	공사 착공	공사준공
서동322-6 주차선 정비 및 택시승강장 설치 등	협의		공사 착공 및 준공

□ 추진실적

◦ 2018.  7.: 수협활어센터~삼천포전통시장 주차장 간 보상협의

◦ 2018.  7.: 삼천포전통수산시장 주차장 확장 추진(수용재결 추진)

◦ 2018.  7.: 삼천포커뮤니티 에코주차장 활성화계획 승인완료(국토부)

◦ 2018. 11.: 서부시장길 주차금지 규제블럭 설치(경찰서 협의, 31개)

◦ 2019.  2.: 삼천포커뮤니티 에코주차장 조성사업 실시설계용역 착수

◦ 2019.  4.: 수협활어센터~삼천포전통시장 주차장 간 건물 철거

◦ 2019.  5.: 수협활어센터~삼천포전통시장 주차장 간 확포장 공사 착공

◦ 2019.  6.: 불법 주정차 단속용 CCTV 1대 설치

◦ 2019.  7.: 삼천포전통수산시장 주차장 보상협의 진행(계속)

◦ 2019. 12.: 삼천포커뮤니티 에코주차장 조성사업 설치사업 착공

◦ 2019. 12.: 삼천포구항 도시재생(어시장길 특성화사업) 착공

◦ 2020. 6.: 삼천포구항 도시재생(어시장길 특성화사업) 준공

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 10.: 시내버스 정류장 이전 및 택시승강장 설치

◦ 2020. 10.: 수협활어센터~삼천포전통시장 주차장 간 확․포장 준공

◦ 2020. 10.: 삼천포커뮤니티 에코주차장 주차타워 조성사업 준공

◦ 2021. 1.: 삼천포전통수산시장 주차장 수용재결 및 협의보상 병행(계속)

□ 문제점 및 대책

◦ 보상 미협의: 협의 및 수용재결을 통한 신속한 대처(지역경제과)