완사천 지방하천 정비

관리번호		5-13		주관부서		건설과(하천팀), 재난안전과(재난방재팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				O			5

◦ 하천 미 개수구간 정비로 홍수 피해 저감 및 사전 재해 예방

◦ 하천개수와 함께 자연과 생물이 되살아나는 시민들이 친숙한 하천 조성

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 곤명면 마곡리~송림리(완사천 일원)

◦ 사업기간: 2018년~2024년

◦ 사 업 량: L=1.3km

◦ 사업내용: 지방하천 개수(축제 및 보축)

◦ 사 업 비(투자계획): 7,200백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	7,200					260	1,950	4,990
국 비
도 비	7,200					260	1,950	4,990
시 비

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)			10%	20%	30%	100%
하천정비사업			정비계획 수립용역	실시설계, 보상협의	공사착공	완공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  1.: 완사천 하천기본계획 수립용역 착수(부산지방국토관리청)

◦ 2018.  8.: 기본계획 관련 주민설명회 개최(곤명면사무소)

◦ 2018. 10.: 완사천 재해예방사업 시행 건의(사천시→경상남도)

◦ 2019.  3.: 완사천 재해예방사업 시행 재건의(사천시→경상남도)

◦ 2020.  2.: 경상남도 지방하천 종합정비계획 수립용역 우선순위 반영 건의

◦ 2020.  9.: 완사지구 재해위험지구 지정

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 11.: 완사천 하천기본계획 수립용역 고시예정(부산지방국토관리청)

◦ 2020. 11.: 경상남도 지방하천 종합정비계획 수립용역 완료예정(경상남도)

◦ 2021.  4.~2021. 12.: 완사천 재해위험지구 정비사업 실시설계 완료

◦ 2022.  3.~2024. 12.: 공사 착공 및 준공