농어촌도로 및 마을 안길 정비

관리번호		5-14		주관부서		도로과(농어촌도로팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			30

◦ 지역 주민숙원사업 해소 및 기반시설 확충

◦ 농수산물의 원활한 수송로 확보

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 관내

◦ 사업기간: 2009년~2028년

◦ 사업내용: 도로 확․포장(L=4,400m/B=3.0m~15.0m)

◦ 사 업 비(사업계획): 20,700백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	20,700	2,430	420	450	900	900	500	15,100
국 비
도 비
시 비	20,700	2,430	420	450	900	900	500	15,100
민자 등

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	40%	50%	60%	100%
삼성A옆 도로 확·포장		공사추진 공사준공
침곡~화전간 도로 확·포장			보상협의	보상협의	보상협의	공사착공 공사준공
대곡~풍정간 도로 확·포장		공사추진 공사준공
침곡·소곡 마을안길 확·포장	소곡 공사준공	침곡 실시설계	침곡 보상협의	침곡 보상협의	침곡 공사착공	공사준공
사촌~대산간 도로 확∙포장	공사착공	공사추진	공사준공

□ 추진실적

◦ 2009.  1.: 실시설계 용역 (침곡~화전간 도로 확․포장)

◦ 2010.  1.~2016. 12.: 보상협의(침곡 ~ 화전간 도로 확․포장)

◦ 2017. 10.: 공사 착공(소곡마을 안길 확․포장)

◦ 2018.  4. 공사 착공(사촌~대산간 도로 확․포장)

◦ 2019.  3.: 공사 준공(소곡마을 안길 확․포장)

◦ 2019.  1.: 실시설계용역 및 보상협의(대곡~풍정간, 침곡)

◦ 2019.  3.: 공사 착공(삼성A옆 도로 확․포장)

◦ 2019.  6.: 공사 준공(삼성A옆 도로 확․포장)

◦ 2019.  6.: 보상협의 및 공사 착공(대곡~풍정간 도로 확․포장)

◦ 2019.  9.: 공사 준공(대곡~풍정간 도로 확․포장)

◦ 2019. 12.: 공사 준공(사촌~대산간 도로 확․포장-2019년분)

◦ 2020.  9.: 공사 준공(사촌~대산간 도로 확․포장-총괄분)

□ 향후 추진계획

◦ 2020.  8.: 공사 준공(사촌~대산간 도로 확․포장-총괄분)

◦ 2021.  1.~12.: 보상협의 및 공사 착공(침곡마을 안길 확․포장)

◦ 2024. 12.: 공사 준공(침곡마을 안길 확․포장)

◦ 2028. 12.: 공사 준공(침곡~화전간 도로 확․포장)

□ 문제점 및 대책

◦ 추진계획에 따라 사업가능하며 사업비 과다로 기간 장기 소요

◦ 사업비 과다로 예산 확보 애로

→ 침곡~화전간 도로 확포장 구간 주변에 아파트 건립계획 및 추진 중에 있음, 사업시행자에게 기반시설 설치 부담, 국·도비 예산지원 건의 및 연차적 예산 확보로 사업 추진