신수도 생태관광 자원화

관리번호		5-16		주관부서		도시재생과(균형발전팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			25

◦ 낙후된 도서지역 주민의 소득증대 및 삶의 질 향상

◦ 한려해상의 수려한 관광자원을 활용한 섬 관광 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 신수동 일원

◦ 사업기간: 2019년~2024년

◦ 사 업 량: 관광지 조성 1식, 부잔교 L=280m, 유어장 6개, 탐방로 L=27km

◦ 사업내용: 신수도 생태관광지 조성

◦ 사 업 비(투자계획): 3,232백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기 투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
계	3,232			19	1,371	1,026	816
국 비	2,592			17	1,101	821	653
도 비	320			1	135	102.5	81.5
시 비	320			1	135	102.5	81.5
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)		10%	50%	80%	100%
신수도 부잔교 설치		실시설계	공사 착공, 공사 준공
신수도 관광지 조성			실시설계, 공사 착공	공사 진행	공사 준공
신수도 유어장 설치			사업시행불가로 예산변경 추진	공사 착공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2016. 10. 21.: 제4차 도서종합개발계획(2018.~2027.) 사업계획 제출

◦ 2018.  3. 30.: 제4차 도서종합개발계획(2018.~2027.) 확정

〈신수도 부잔교 설치〉

◦ 2019.  1.: 실시설계용역 발주

◦ 2019.  3.: 실시설계 완료

◦ 2019.  4.: 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

◦ 2019.  4.: 공유수면 점용·사용 승인

◦ 2019. 10.: 공유수면 점용·사용 실시계획 신고

◦ 2020.  3.: 공사 착공

◦ 2020.  6.: 공사 준공

〈신수도 관광지 조성〉

◦ 2020.  3.: 실시설계용역 착수

◦ 2019.  4.: 실시설계 완료

◦ 2019.  6.: 농지전용협의, 공사 발주

〈신수도 유어장 설치〉

◦ 2020.  4.: 국립공원 내 유어장 설치불가, 사업계획 변경 검토(주민 협의)

◦ 2020.  9.: 사업계획 변경(예산 조정) 승인 신청(행정안전부)

□ 향후 추진계획

구 분		부잔교 설치	관광지 조성	유어장 설치
사업개요	위 치	사천시 신수동(신수도) 일원
	사업기간	’19. 1.~’20. 12.	’20. 1.~’22. 12.	’20. 1.~’21. 12.
	사업비(백만원)	560	2,252	420
세부계획	공유수면 점·사용 허가	완료
	손실보상 협의	완료	‘20. 6. 예정
	공사 착공 및 준공	’20. 3.~’20. 12.	’20. 6.~’22. 6.

◦ 신수도 관광지 조성

- 2020.  7.~2022. 12.: 편입토지 보상(계속), 공사 착공 및 준공

※ 해양수산부 시행□신수항 친수공간 조성사업□과 연계(신수동 137-5번지 일원)

◦ 신수도 유어장 설치

- 2020. 9.: 사업계획(예산 조정)  변경 승인 요청[신수도 관광지 조성 연계하여 시행]

□ 문제점 및 대책

◦ 탐방로 신설 및 유어장 설치 등 한려해상국립공원 구역 내 행위허가 불가함

→ 환경부 및 국립공원관리공단과 지속적인 협의, 사업계획(예산조정) 변경 승인절차 진행