다솔사역과 와인갤러리 브랜드사업 및 체험단지 조성

관리번호		6-10		주관부서		관광진흥과(관광개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○					○		20

◦ 관광객 증가를 위한 생태원 꽃바람길 및 완사역 복화문화예술공원 조성

□ 사업개요

◦ 사업위치: 사천시 곤명면 신흥리 와인갤러리~완사역 일원

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사업내용: 다래와인갤러리 내 신규콘텐츠 개발, 다래전망대 설치, 체험시설 및 프로그램 확충, 미니재배단지 조성, 교통환경개선 등

◦ 사 업 비(투자계획): 10,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	10,000					5,000	5,000
국 비
도 비
시 비	10,000					5,000	5,000

□ 연도별 추진목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	100%
곤명생태원 꽃바람길 조성		기본계획수립	실시설계 및 공사착공	공사시행	완공
완사역 복합문화예술공원 조성		기본계획수립	실시설계 및 공사착공	공사시행	완공

□ 추진실적

◦ 2018. 9.: 2019년도 당초예산 편성 요구

◦ 2019. 1.: 기본계획수립용역 시행

◦ 2019. 8.: 2020년도 당초예산 편성 요구

◦ 2019. 10.: 기본계획수립 최종보고 및 용역 준공

◦ 2020. 9.:  2021년 당초예산 편성 요구

□ 향후 추진계획

◦2021년  예산 확보 후 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 2020년 예산 미확보로 인해 사업추진 애로