시도 확․포장 추진

관리번호		6-19		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			25

◦ 이용객의 편익 증대 및 교통혼잡 해소를 위한 교통소통대책 실시

□ 사업개요

◦ 위    치: 사남면 유천~KAI간 등 5개소

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사 업 량

- 유천~KAI간(시도12호선): L=300m, B=8m

- 양동마을앞(시도3호선): L=570m, B=15m

- 원전~마곡간(시도19호선): L=1,300m, B=6m→8m

- 감곡(시도9호선) 안전한도로 만들기: 1개소

- 대곡~구암간(시도22호선): L=233m(구암텃골)

◦ 사업내용: 시도 확․포장

◦ 사 업 비(사업계획): 6,035백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	6,035	576	684	1,275	900	1,300	1,300
시 비	6,035	576	684	1,275	900	1,300	1,300

□ 연도별 달성목표

단위명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022. 6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	50%	100%
유천~KAI간 (시도12호선)			도로구역 변경	공사 착공 및 준공
양동마을앞 (시도3호선)	도로구역 결정	보상	보상	공사 착공 및 준공
원전~마곡간 (시도19호선)	실시설계	공사 착공 및 준공
감곡 (시도9호선)				안전한도로만들기 준공	안전한도로만들기 착공
대곡~구암간 (시도22호선)	실시 설계 및 도로 구역결정	보상	공사 착공 및 준공

□ 추진실적

◦ 2018.  3.: 양동마을 실시설계

◦ 2018.  5.: 원전~마곡 실시설계

◦ 2018. 12.: 양동마을 도로구역결정 고시

◦ 2019.  2.: 원전~마곡 착공

◦ 2019.  3.: 양동마을 보상

◦ 2019.  9.: 원전~마곡 준공

◦ 2020.  5월: 구암 텃골마을 착공

◦ 2020.  7.: 유천~KAI간(시도12호선)실시설계 착수

□ 향후 추진계획

◦ 유천~KAI간(시도12호선)

- 2020. 11.: 도로구역 변경

- 2021. 12.: 공사 준공

◦ 양동마을앞(시도3호선)

- 2019.  9.~: 보상

- 2022.  1.~2022. 12.: 공사 착공 및 준공

◦ 감곡(시도9호선)

- 현재 국지도 33호선~감곡마을회관까지 확장완료

- 상대민원으로 인하여 잔여구간 당장추진 애로

- 현장조서를 통해 시급한 부분에 대하여 안전한도로 만들기사업으로 추진

◦ 대곡~구암간(시도22호선)

- 2020. 5.~2021. 12.: 구암 텃골마을 우회도로개설사업 착공 및 준공