농촌중심지 활성화 사업

관리번호		6-21		주관부서		도시재생과(농촌개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			65

◦ 정주서비스 기능 충족과 중심거점 공간 육성으로 주민의 삶의 질 향상

◦ 농촌 인구유지 및 생활환경 개선을 위한 기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 사천읍, 용현면, 곤명면, 사남면 일원

◦ 사업기간: 2016년~2021년

◦ 사 업 량: 사천읍 사천활력거점센터 등 4개소, 용현면 길쌈두레문화관 등 6개소,

곤명면 다솔문화센터 등 8개소, 사남면 중심지활성화센터 등 5개소

◦ 사업내용: 기초생활기반 확충, 지역경관 개선, 지역역량 강화

◦ 사 업 비(투자계획): 25,147백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	25,147	3,579	3,517	7,933	6,638	3,480
국 비	17,603	2,506	2,461	5,553	4,647	2,436
도 비	2,263	321	317	715	597	313
시 비	5,281	752	739	1,665	1,394	731
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율 (누계)	25%	50%	75%	100%
사천읍	기본계획수립‧고시	시행계획 용역 추진	시행계획수립‧고시 및 공사착공	공사준공
용현면	기본계획수립‧고시	시행계획 용역 추진	시행계획수립‧고시 및 공사착공	공사준공
곤명면	공사착공	공사시행	공사시행	공사준공
사남면	기본계획수립‧고시	시행계획수립‧고시	공사착공	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

〈사천읍 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2017. 9.: 2018년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 4.: 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 6.: 시행계획 수립 용역 착수

◦ 2020. 7.: 시행계획 수립 및 고시를 위한 경남도 협의

◦ 2020. 8.: 기본계획 변경 및 시행계획 수립 고시

◦ 2020. 9월까지: 공사 및 용역발주 준비

<용현면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2017. 9.: 2018년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 3.: 위․수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사)

◦ 2019. 5.: 기본계획 수립 고시

◦ 2019. 9.: 시행계획 수립 착수

◦ 2020. 9월까지: 시행계획 수립 용역 정상 추진 및 시행계획 수립 협의

<곤명면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2017. 3. 16.: 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 5. 04.: 기본계획 변경 수립 고시

◦ 2018. 6. 07.: 시행계획 수립 고시

◦ 2018. 8. 29.: 공사 착공

◦ 2020. 9월까지: 공사 정상 추진

<사남면 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2016.  9.: 2017년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 10.: 기본계획 수립 고시

◦ 2019. 12.: 기본계획 변경 및 시행계획 수립 고시

◦ 2020.  3.: 공사착공

◦ 2020.  9월까지: 공사 정상 추진

□ 향후 추진계획

<사천읍 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2020. 10.: 공사 착공

◦ 2021. 12.: 공사 준공

<용현면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2020. 11.: 시행계획 수립 고시

◦ 2020. 12.: 공사 착공

◦ 2021. 12.: 공사 준공

<곤명면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2020. 11.: 시행계획 변경 고시

◦ 2021.  2.: 사업 준공

<사남면 농촌중심지 활성화사업>

◦ 2021. 12.: 공사 준공