행정복지센터 신축

관리번호		1-1		주관부서		행정과(시정팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			45

◦ 대형 아파트 건립으로 증가하는 행정수요에 선제적 대응

◦ 청사 신축으로 주민 편의도모 및 복지증진

□ 사업개요

◦ 사업대상: 4개소(정동면, 사남면, 용현면, 동서금동)

◦ 사업기간: 2018년~2021년

◦ 사업내용: 신축 3개소(정동면, 사남면, 용현면), 이전 신축 1개소(동서금동)

◦ 사 업 비(투자계획): 17,150백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	17,150	600	200	3,600	9,350	3,400
시 비	17,150	600	200	3,600	9,350	3,400

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	15%	40%	50%	80%	100%
정동면	주차장 부지 매입, 실시설계용역	공사 착공 및 준공	완공
사남면		주차장 부지 매입, 행정절차 이행	주차장 부지 매입, 공사 착공	공사 준공	완공
용현면	행정절차 이행	주차장 부지 매입, 행정절차 이행	공사 착공 및 준공	완공
동서금동		행정절차 이행	주차장 등 부지 매입	공사 착공 및 준공	완공

□ 추진실적

〈정동면행정복지센터 신축〉

◦ 2016. 9.: 건립계획(시장방침)

◦ 2016.10.: 중기지방재정계획 수립

◦ 2018. 7.: 경남도 투자심사위원회 승인

◦ 2018. 7.24.: 정동면행정복지센터 신축계획 수립(시장 방침)

◦ 2018. 8.28.: 공유재산심의회 의결(정동면행정복지센터 신축)

◦ 2019. 1.~ 3.: 감정 재평가 및 보상금 산정, 보상협의

◦ 2019. 6.: 정동면행정복지센터 건물 철거, 실시설계 용역, 주차장 부지매입

◦ 2019. 7.: 정동면행정복지센터 신축 공사 착공

◦ 2019. 8.: 정동면행정복지센터 주차장 확장공사 착공

◦ 2020. 4.: 정동면행정복지센터 주차장 확장공사 준공

◦ 2020. 4.: 정동면행정복지센터 신축 공사 준공

〈사남면행정복지센터 신축〉

◦ 2017. 3. 9.: 사남면행정복지센터 주차장 확장계획 수립

◦ 2017. 5.25.: 사남면행정복지센터 도시관리계획(재정비) 지형도면 승인고시

◦ 2018. 8. 3.: 사남면행정복지센터 청사 신축 및 주차장 확장계획 수립(시장 방침)

◦ 2018. 8.28.: 공유재산심의회 의결(사남면행정복지센터 주차장 확장사업)

◦ 2019. 4. 9.: 사남면행정복지센터 주차장 확장(변경) 계획 수립(시장 방침)

◦ 2019. 6.: 사남면행정복지센터 주차장 확장 공유재산 심의 및 관리계획 의결

◦ 2019. 9.: 사남면행정복지센터 주차장 확장 사업비(1,100백만원) 제2회 추경 반영

◦ 2019.12.: 감정평가를 통한 보상금 산정 및 보상협의

◦ 2020. 1.: 사남면행정복지센터 주차장 확장부지 매입

◦ 2020. 2.: 사남면행정복지센터 주차장 확장공사 실시설계용역 시행

◦ 2020. 5.: 사남면행정복지센터 주차장 확장공사 착공

◦ 2020. 9.: 사남면행정복지센터 주차장 확장공사 준공

〈용현면행정복지센터 신축〉

◦ 2018. 7.27.: 용현면행정복지센터 청사 신축 및 주차장 확장계획 수립(시장 방침)

◦ 2018. 8.28.: 공유재산심의회 의결(용현면행정복지센터 주차장 확장사업)

◦ 2018.10.25.: 경남도 투자심사위원회 승인

◦ 2019. 3.: 감정평가 및 손실 보상금 산정

◦ 2019. 6.: 주차장 확장 부지 매입 완료

◦ 2019. 8.: 용현면행정복지센터 변경 건립 계획 수립(용현면 농촌중심지 활성화사업과 통합 추진/오동지교류센터와 복합건물 신축)

◦ 2019. 8.: 용현면행정복지센터 변경 건립 계획에 따른 지방재정 투자심사 재심사 의뢰

◦ 2019.10.: 용현면행정복지센터 변경 건립 계획에 따른 지방재정 투자심사 조건부 승인

◦ 2019.11.: 용현면행정복지센터 신축공사 기본 및 실시설계용역 시행

◦ 2020. 1.: 용현면행정복지센터 주차장 확장사업 실시설계용역 시행

◦ 2020. 7.: 용현면행정복지센터 신축부지 내 정신건강센터 철거

◦ 2020. 8.: 용현면행정복지센터 신축공사 기본 및 실시설계용역 최종 보고회

◦ 2020. 9.: 용현면행정복지센터 신축공사 BF예비인증 및 공용건축물 협의

◦ 2020. 12.: 용현면행정복지센터 신축공사 착공

〈동서금동행정복지센터 이전 신축〉

◦ 2018. 8. 3.: 동서금동행정복지센터 이전 신축계획 수립(시장 방침)

◦ 2019. 4.30.: 동서금동행정복지센터 이전부지 주민의견 수렴

◦ 2019.12.23.: 동서금동행정복지센터 이전 신축계획 수립(시장 방침)

◦ 2020. 1.: 동서금동행정복지센터 도시관리계획(공공청사) 결정 의뢰

◦ 2020. 3.: 공유재산 관리계획 승인

◦ 2020. 6.: 동서금동행정복지센터 도시관리계획(공공청사) 결정

◦ 2020. 8.: 제3차 정기 지방재정 투자사업 심사 의뢰

◦ 2020. 10.: 제3차 정기 지방재정 투자심사위원회 심의결과(재검토)

◦ 2020. 12.: 정밀안전진단 용역 실시(C등급)

□ 향후 추진계획

구 분		정동면	사남면	용현면	동서금동
사업개요	위 치	대곡리 298-2 일원	화전리 1316-3 일원	송지리 228-1 일원	동서금동 159-3 일원
	사업기간	’18. 8. ~ ’20. 4.	’20. 1. ~ ’21. 12.	’18. 8. ~ ’20. 12.	’20. 1. ~ ’21. 12.
	사업비(백만원)	3,700	3,950	3,800	5,700
세부계획	중기지방재정계획	완료	완료	완료	완료
	도시계획시설 결정	완료	완료	완료	완료
	도 지방재정 투자심사	조건부	2021. 12.	완료	2021. 5.
	공유재산심의 등	완료	완료	완료	완료
	주차장 및 관련 부지 매입	완료	완료	완료	’20. 6. ~ ’21. 12.
	공사 착공 및 준공	완료	’20. 1. ~ ’21. 12.	’20. 10. ~ ’21. 8.	’21. 1. ~ 12.

□ 문제점 및 대책

◦ 문제점 : 정밀구조안전진단 결과 C등급으로 경남도 지방재정투자 심사 승인 애로

◦ 대  책

- 주민불편 및 내진보강 필요 건물의 당위성 부각으로 지방재정투자 심사 의뢰

- 토지 보상 협의와 토지 수용 재결 절차 병행

- 생활SOC 복합화사업 등 공모사업과 연계하여 추진