비토관광레저단지 인프라 확대 및 활성화

관리번호		3-11		주관부서		관광진흥과(관광개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			35

◦ 비토관광레저단지는 자연경관 및 지리적 이점이 뛰어나지만 인프라시설이

부족하여 이를 활성화 할 수 있는 방안 마련이 필요함

□ 사업개요

◦ 사업위치: 사천시 서포면 비토리 솔섬 일대『비토 쏙사귀(갯벌) 생태체험시설 조성』

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사업내용: 갯벌 생태체험장(쏙사귀) 설치, 생태탐방로 설치 L=1.3km

◦ 사 업 비(투자계획): 5,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	5,000				300	1,434	3,266
균특(전환)	2,200				150	717	1333
도비	660				45	215	400
시 비	2,140				105	502	1,533

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	100%
생태체험장 조성	기본계획수립	기본계획수립	설계 및 시설물 설치	공사 시행	공사 시행 및 준공
생태탐방로 조성	기본계획수립	기본계획수립	설계 및 시설물 설치	공사 시행	공사 시행 및 준공

□ 연도별 추진목표

□ 추진실적

◦ 2019.  1.: 기본계획수립용역 시행

◦ 2019.  4.: 2020년 관광자원개발사업 신규사업 신청

◦ 2019.  7.: 월등도 외 4개소 기본계획수립용역 중간보고회 개최

◦ 2019. 12.: 관광자원개발사업 신규사업 확정(균특전환사업) 내시 통보

◦ 2020.  1.: 비토 생태체험시설 조성사업 기본 및 실시설계용역 발주

◦ 2020.  3.~7.: 주민의견 수렴 및 행정절차 추진중

◦ 2020. 11.: 비토 쏙사귐(갯벌) 생태체험시설 연결로 정비공사 발주

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 12.~2022. 12.: 공사시행 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦원활한 사업추진을 위해 균특. 도비 예산 확보 노력