용궁수산시장 기반시설 확충

관리번호		3-9		주관부서		지역경제과(지역경제팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			70

◦ 수산전문시장으로 관광적 상품을 높이기 위한 기반시설 구축

◦ 시설현대화 개선 및 확충을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치: 용궁수산시장 및 전통수산시장(동서동)

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사업내용: 시설개선 및 확충, 상권 활성화사업

◦ 사 업 비(투자계획): 10,526백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	10,526		1,114	212	5,408	3,492	300
국 비	5,587		150		3,245	2,035	157
시 비	4,489		964	212	2,163	1,457	143

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	40%	50%	70%	90%	100%
주차장 설치	부지매입 완료	공사착공, 준공
시설개선 및 현대화사업	국비확보 후 사업시행	계속	계속	계속	계속
전통시장활성사업	시설개선 및 확충사업	계속	계속	계속	계속

□ 추진실적

◦ 2018. 12.: 해수인입시설 설치 실시설계 용역 완료

◦ 2019.  5.: 용궁축원제 개최

◦ 2019.  9.: 용궁수산시장 버스주차장 조성사업 준공

◦ 2019.  9.: 2020년 주차환경개선사업(용궁주차타워) 선정

◦ 2019. 10.~2020. 1: 화재알림시설 설치사업 착공 및 준공

◦ 2020.  1.: 해수인입시설 설치사업 2021년 전통시장 시설현대화 사업 도공모사업 신청

◦ 2020.  6.: 용궁주차타워 기본 및 실시설계 용역 시행

◦ 2020.  8.: 용궁주차타워 조성사업 지장가옥철거공사 및 지정폐기물 운반처리용역 시행

◦ 2020. 12.: 용궁주차타워 조성사업 지장가옥철거공사 및 지정폐기물 운반처리용역 완료

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  1.: 용궁주차타워 기본 및 실시설계 용역 완료

◦ 2021.  1.: 해수인입시설 설치를 위한 지질조사 및 실시설계 용역 착수

◦ 2021.  2.~11.: 용궁주차타워공사 착수 및 준공

◦ 2021.  2.~11.: 용궁주차타워공사 착수 및 준공