정동‧사남권역 중학교 설립 지원

관리번호		4-4		주관부서		평생학습센터(교육지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			30

◦ 정동‧사남지역내 공동주택 입주 시 부족한 학교 기반시설 확충을 통한 교육환경 조성

◦ 첨단항공도시와 부합되는 미래형 에코스쿨 설립으로 미래 교육도시로 발전 도모

□ 사업개요

◦ 위    치: 용남중학교(사천시 용현면 선진길 24 일원)

◦ 사업기간: 2019. 10.~2022. 10.

◦ 사 업 량: 미래교육관(3동, 연면적 3,770㎡)

- 1동: 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 다목적강당 920㎡)

- 1동: 소규모공연장(1층, 850㎡)

- 1동: 특별교실 5실(1층, 750㎡) 및 마을학교 3실(2층, 450㎡)

◦ 사업내용: 학생수 증가(2019년 3학급 60여 명)에 따른 학교시설 확충 지원

◦ 사 업 비(투자계획): 6,346백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	6,346				1,427	3,246	1,673
국 비	3,173				1,427	1,746
시 비	3,173					1,500	1,673

※ 미래교육관 부지 확보: ’20. 6. 18. 토지 기탁(2필지 1,399㎡)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		10%	30%	50%	80%	100%
정동‧사남권역 중학교 설립 지원		세부계획 수립	설계용역 및 실시설계	공사 착공	공사	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2019.  8.: 총사업비(70억 원)의 시 대응투자(35억 원) 확약

◦ 2019. 11.: 시 지방재정 투자심사

◦ 2020.  2.: 교육관 부지 토지기탁 확약 체결(사유지 2필지 1,399㎡→용남학원)

◦ 2020.  2.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사

- 도시관리계획 결정(변경) 등 사전절차 이행 요구(조건부 승인)

◦ 2020.  3.~6.: 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 용역(2,370㎡)

◦ 2020. 6. 18.: 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시

(33,903㎡ → 36,273㎡ / 증 2,370㎡)

◦ 2020. 6. 23.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정

◦ 2020. 11.: 도교육청 특별교부금 확정

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 12~2021. 2.: 기본설계용역 현상공모

◦ 2021. 2.~2021. 6.: 실시설계용역

◦ 2021. 6.~2021. 7.: 입찰 및 대상 선정

◦ 2021. 7.: 공사 착공

◦ 2022. 10.: 공사 준공 및 미래교육관 운영

□ 문제점 및 대책

◦ 공사 진행에 따라 시 지원금 교부