발전소 우회도로 조기 개설

관리번호		6-1		주관부서		기획예산담당관(기획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			34

◦ 화력발전소 추가 건설에 따른 물동량 증가로 배후도로 개설 필요

◦ 시민안전 위해요소 제거 및 시가지 교통난 해소

□ 사업개요

◦ 위    치: 삼천포도서관 뒤 ~ 용강정수장 ~ 구.향촌농공단지 진입로 입구

◦ 사 업 량: L=4.3㎞, B=18m

◦ 사업내용: 우회도로 개설

◦ 사 업 비(투자계획): 58,200백 만원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	58,200				1,200	10,000	34,700	12,300
시 비	33,600				1,200	10,000	22,400
민자 등	24,600						12,300	12,300

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	60%	80%	100%
우회도로 개설		실시설계	실시설계 및 토지보상	토지보상 및 공사착공	공사시행	완공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2015.  7.~2019. 2. 14.: 발전소 우회도로 개설 협상 T/F팀 협의 12회

◦ 2019.  2.~12.: 실무협상 수시 개최

◦ 2019.  3.~12.: 사천시장, GGP사장 대표자 협상 5회

◦ 2019.  6.: 발전소 우회도로 실시설계 용역 착수(도시과)

◦ 2019. 12.  4.: 발전소 우회도로 개설 협약 체결

◦ 2020.  1.~: 발전소 우회도로 개설 실무협의회 개최(5회)

◦ 2020.  6. 25.: 도시계획시설(도로:남부 대로1-2호선)사업 실시계획 인가(도시과)

◦ 2020.  8. 10.: 공공토지비축 업무 협약 체결(사천시, LH)

◦ 2020.  9.~12.: 물건조사 및 분할측량

◦ 2020. 12. 11.: 발전소 우회도로 실시설계용역 준공(도시과)

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  1.~: 토지보상 및 공사시행