시도1호선 확장사업 본격 시행

관리번호		6-17		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

◦ 이용객의 편익 증대 및 교통혼잡 해소를 위한 도로 확장

□ 사업개요

◦ 위    치: 사남면 LIG 삼거리~남양동행정복지센터 일원

◦ 사업기간: 2018년~임기후

◦ 사 업 량: 도로 확․포장 L=8.42㎞

◦ 사업내용: 시도1호선 확․포장

◦ 사 업 비(사업계획): 130,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	130,000		227	573	2,000	5,000	5,000	117,200
시 비	130,000		227	573	2,000	5,000	5,000	117,200

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	20%	30%	40%	100%
시도1호선 확장 사업 본격 시행	시도1호선 확장 사업 본격 시행	설계완료 행정절차 이행 및 보상	보상 및 구간별 공사추진	보상 및 구간별 공사추진	보상 및 구간별 공사 추진 (LIG삼거리~ 죽천교 구간 완료)	확장 완료

□ 추진실적

◦ 2018.  7.: 시도1호선 확․포장공사 추진계획 보고

◦ 2019.  3. 6.: 착수 보고

◦ 2019.  4.: 의회 보고 및 주민설명회 개최

◦ 2019.  6.: 용역 중간 보고

◦ 2019.  7.: 교통시설 안전진단 용역

◦ 2020.  3.  5.: 최종 보고

◦ 2020.  3. 16.: 감정평가

◦ 2020.  6.: 도로구역 결정 변경 협의

◦ 2020.  8.: 실시설계용역 완료

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  1.: 도로구역 결정(LIG앞 삼거리~병둔사거리)

□ 문제점 및 대책

◦ 시도1호선 전 구간 동시 확장은 막대한 사업비 소요되므로 추진 애로

→ 구간별 확장 추진