권역별 노인복지회관 건립

관리번호		1-4		주관부서		노인장애인과(시설관리팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

◦ 날로 다양해져 가는 어르신들의 복지서비스 욕구에 부응하고 고령사회에

접어든 어르신들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

□ 사업개요

◦ 위    치: 3개 권역(서부권, 동부권, 남부권)

◦ 사업기간: 2018년~2024년

◦ 사업내용: 권역별(서부, 동부, 남부) 노인복지회관 건립

◦ 사 업 비(투자계획): 26,300백만원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	26,300			200	1,500	5,400	5,300	13,900
국 비
도 비
시 비	26,300			200	1,500	5,400	5,300	13,900

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	5%	10%	20%	35%	50%
권역별 노인복지회관 건립	건립 기본 방침	기본구상용역, 서부노인복지관 행정절차진행	서부노인복지회관 실시설계용역, 계약심사,건축협의, 공사착공	서부노인복지회관 증축공사 준공, 동부노인복지회관 기본 및 실시설계 용역 착공	동부·남부노인복지회관 공사 추진

□ 추진실적

◦ 2018.  9.: 건립 기본 방침 결정

◦ 2019.  3.: 타당성 및 기본구상 용역

◦ 2019.  8.~9.: 공유재산 심의, 투․융자 심사

◦ 2020.  3.: 서부노인복지관 실시설계 용역

◦ 2020.  9.: 서부노인복지회관 실시설계용역 완료

◦ 2020. 12.: 서부노인복지회관 공사 착공

◦ 2021.  3.: 동부노인복지회관 건립사업 설계공모

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  3.: 동부노인복지회관 기본 및 실시설계 용역 착공

◦ 2021. 12.: 서부노인복지회관 증축공사 준공

◦ 2022년 이후: 동부·남부노인복지회관 공사추진

□ 문제점 및 대책

◦ 많은 사업비 소요로 시 재정 여건상 사업기간 장기화 우려