스마트도시 방재시스템 구축

관리번호		2-2		주관부서		재난안전과(재난행정팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○		○					100

◦ 자연마을 무선방송시스템, 재난예경보 시설 통합으로 신속한 대응체계 구축

◦ 스마트시티 통합플랫폼 및 도시안전망 서비스 구축을 통한 골든타임 확보

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 전역

◦ 사업기간: 2018년~2020년

◦ 사 업 량

- 재난 예경보시스템 통합, 자연마을 원격제어 무선방송 시스템구축

- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축(공모사업)

◦ 사업내용

- 재난 예경보 시설 통합(9종82대)

- 스마트시티 통합플랫폼 및 도시안전망 서비스 구축

◦ 사 업 비(투자계획): 1,916백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	1,916		166	550	1,200
국 비	600				600
도 비	180				180
시 비	1,136		166	550	420
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	15%	70%	100%	100%
재난예경보시스템 통합	준공완료	운영	운영	운영
자연마을 원격제어 무선방송 시스템	계획수립	설계 및 사업추진	운영	운영
스마트시티 통합플랫폼 기반구축 (공모사업)		계획수립	준공완료	운영

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2019. 1. 28.: 재난예경보 시설 통합관리시스템 준공

◦ 2019. 1. 29.: 자연마을 원격제어 무선방송시스템 설치계획 보고

◦ 2019. 2. 12.: 2019년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 공모신청서 제출

◦ 2019. 2. 18.~2. 28.: 자연마을 원격제어 무선방송시스템 신청 대상지 현장 조사

◦ 2019. 3. 19.: 자연마을 원격제어 무선방송시스템 신청 대상지 현장조사 결과 보고

◦ 2019. 6.  1.: 자연마을 원격제어 무선방송시스템 사업시행

◦ 2019. 6. 26.: (회계과) 자연마을 원격제어 무선방송시스템 사업 조달계약의뢰

◦ 2019. 9.  9.: 2019년 자연마을 원격제어 무선방송시스템 구축 준공

◦ 2019.10. 26.: 2019년 자연마을 무선방송시스템 프리엠프 구입 준공

◦ 2020. 1. 21.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 공모신청서 제출

◦ 2020. 2. 12.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 최종선정

◦ 2020. 6. 25.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 시행

◦ 2020. 7.  6.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 사전규격 공고

◦ 2020. 7. 20.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 본 공고

◦ 2020. 8. 13.: 평가위원 개최(우선협상 대상자 선정)

◦ 2020. 9.  3.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 착공

◦ 2020. 12.15.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 준공

◦ 2020. 12.18.: 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 완료보고회 개최