항공 MRO 산업단지 조기 조성

관리번호		2-6		주관부서		산업입지과(산단조성팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			55

◦ 항공 선도기업 KAI 1·2공장이 인접한 지역에 항공MRO 및 생산단지 조성
으로 연구개발, 생산, MRO 복합항공산업 클러스터로 발전

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 사천읍 용당리 일원

◦ 사업기간: 2017년~2023년

◦ 사 업 량: 산업단지 조성 299,765㎡

◦ 사업내용: MRO단지 조성(1·2 단계 149,628㎡, 3단계 150,137㎡)

◦ 사 업 비(투자계획): 150,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	150,000	7,585	12,293	54,522	17,920	7,680	25,000	25,000
국 비
도 비	60,000	2,585	3,000	24,175	7,168	3,072	10,000	10,000
시 비	90,000	5,000	9,293	30,347	10,752	4,608	15,000	15,000
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	40%	50%	70%	90%	100%
단지계획수립 고시	계획수립					준공고시
공사착공	실시설계	보상협의	공사착공	공사시행 및 보상협의	공사시행	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2014. 12. 23.: 항공정비사업(MRO) MOU 체결(경남도, 사천시, KAI)

◦ 2017. 12. 19.: 항공 MRO 사업자 선정(국토부)

◦ 2018.  1. 19.: 보상계획 열람 공고

◦ 2018.  3. 20.: 산업단지계획 수립 및 실시설계 용역 착수

◦ 2018.  6. 28.: 산업단지계획 수립 및 전략환경영향평가 설명회 개최

◦ 2018.  8. 17.: 관련 실과 협의 및 전략환경영향평가 협의

◦ 2018. 11. 22.: 경상남도 지방산업단지계획 심의위원회 심의(조건부 가결)

◦ 2018. 12. 13.: 용당(항공MRO)일반산업단지계획 고시(사천시고시제2018-252호)

◦ 2019.  1. 31.: 경상남도 지방건설기술심의위원회 심의(조건부)

◦ 2019.  3. 10.: 공사원가의 사전검토 요청(조달청)

◦ 2019.  6. 25.: 공사착공(1·2단계)

◦ 2019.  6. 27.: 착공식 개최

◦ 2019.  9. 24.: 이주대책 주민설명회 개최

◦ 2019. 12.  2.: 수용재결 신청

◦ 2019. 12. 19.: 공사준공(1단계)

◦ 2020.  1. 14.: 타당성 조사의뢰(3단계)

◦ 2020.  6.  1.: 입주임대차 계약 체결(임대기간:10년)

◦ 2020.  6. 22.: 용당(항공MRO) 일반산업단지계획 변경 용역(3단계 포함) 착수

◦ 2020. 12. 10.: 지방재정 투자심사(3단계 포함) 의뢰

◦ 2021.  1. 29.: 3단계 부지 보상계획 열람 공고

◦ 2021.  3.  4.: 지방재정 투자심사 조건부 승인

◦ 2021.  4.  6.: 3단계 부지 감정평가

◦ 2021.  6.  4.: 3단계 부지 손실보상협의 추진

◦ 2021.  6. 22.: 산업단지계획(변경) 승인 신청

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  7.: 산업단지계획(변경) 및 환경영향평가(초안) 공람공고 및 합동설명회

◦ 2021.  9.: 공사 준공(1·2단계)

◦ 2021.  9.: 3단계 산업단지계획(변경) 승인·고시

◦ 2023. 12.: 사업 완료

□ 문제점 및 대책

◦ 당초 대비 총사업비 증액에 따른 시비 부담 가중으로 조기 완성 애로

→ 전체 중 1~2단계 조기 완료를 위한 예산확보 행정력 집중