호복포항 개발사업

관리번호		3-4		주관부서		해양수산과(연안관리팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			60

◦ 어촌의 산업구조를 해양관광·레저 등으로 다변화 하고, 주민역량 강화를 통한 지속가능한 성장 토대를 마련

□ 사업개요

◦ 위    치: 동서동 호복포항 외 3개항(광포항, 산분령항, 실안항)일원

◦ 사업기간: 2019.~2022.(3년간)

◦ 사 업 량: 호복포항 외곽시설 L=100m, 물양장 설치 1식, 해상좌대낚시터 설치 1식, 다목적회관 설치 1식 등

◦ 사업내용: 관광산업 활성화를 위한 호복포항 개발

◦ 사 업 비(투자계획): 14,967백만 원

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	14,967			5,239	6,736	2,992
국 비	10,477			3,667	4,715	2,095
도 비	1,347			472	606	269
시 비	3,143			1,100	1,415	628
민자 등

(단위: 백만 원)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	40%	50%	60%	100%
기본계획수립	예비계획	기본계획
실시설계			실시설계용역	실시설계용역
공사시행				공사착공	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  5.: 호복포항 개발계획 수립용역 착수

◦ 2018. 10.: 어촌뉴딜300사업 공모신청

◦ 2018. 12.: 공모사업 선정

◦ 2019.  3.: 기본 및 실시설계용역 발주

◦ 2020.  3.: 기본계획 재수립 용역 시행

◦ 2020.  4.: 지역역량강화 용역 시행

◦ 2020.  9.: 기본계획 승인 고시

◦ 2020. 11.: 사업 위탁시행(한국농어촌공사)

◦ 2020. 12.: 실시설계 및 행정절차 이행

◦ 2021. 06.: 공사 착공

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 06.: 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 행정절차 이행 장기 소요로 사업지연 예상

⇒ 실시설계와 병행 추진으로 사업기간 단축