대포 피셔리나항 개발과 크루저요트 산업 활성화

관리번호		3-6		주관부서		해양수산과(해양레저팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○					○		10

◦ 기존 어항시설을 활용 해양레저, 레크레이션 공간 등 어촌관광 기반    시설을 갖춘 다기능어항으로 개발하여 부족한 해양레저 기반시설 확충

◦ 어업과 해양레저의 상생발전 도모로 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

◦ 위    치: 대포동 대포항

◦ 사업기간: 2018.~2022.

◦ 사 업 량: 마리나시설 등 1개소

◦ 사업내용: 요트 및 레저기구 정박시설 1식

◦ 사 업 비(투자계획): 530백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	530		30	-	-	500
국 비	250			-	-	250
도 비	75			-	-	75
시 비	205		30	-	-	175
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	15%	30%	100%
대포 피셔리나항 개발과 크루저 요트산업 활성화	착공(타당성 조사 용역)	준공(타당성 . 조사 용역)	예산확보	착공	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018. 1.: 조사용역비 확보

◦ 2018. 3.: 대상어항 검토(지방어항)

◦ 2018. 9. 12.: 착공(타당성 조사 용역)

◦ 2019. 2.  8.: 대포마을 주민설명회 개최

◦ 2019. 2. 28.: 용역 일시중지

◦ 2019. 9. 10: 타당성 조사용역 1차 중간보고

◦ 2019. 10. ~ 12월: 제3의 후보지(낙지포항, 구랑항 등) 조사

◦ 2019. 12. 4: 호복포항 어촌뉴딜사업 추진불가(주민이전문제, 해수부의견)

◦ 2019. 12. 13: 타당성조사 용역 2차 중간보고

◦ 2020. 1.~ 4월: 어촌뉴딜사업 기 확정 지방어항(중촌항, 구우진항) 대상지 추가 3차 조사

◦ 2020. 7.: 중촌항, 구우진항, 호복포항 어촌뉴딜 기본계획 반영불가

◦ 2020. 8.: 타당성조사 용역 최종보고 및 준공

◦ 2021.  1.: 도비 재정지원사업 건의(예산 확보 불가)

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 09.: 마리나 기본계획용역을 위한 추경예산 확보

◦ 2021. 10.: 마리나 기본계획용역 실시

◦ 2021. 12.: 마리나 기본계획용역 완료

◦ 2022. 01.: 마리나 기반시설 조성사업(균특사업) 신청

□ 문제점 및 대책

◦ 피셔리나항 건립을 목표로 타당성조사 용역을 통해 관내 경남도 관리항인 지방어항의 위치, 수심, 면적 등 자연조건을 검토한 바 타 어항에 대비하여 지방어항 중 최적지로 선정된 대포항이 대포마을 주민설명회 개최결과 어항 협소로 레저기구 정박시설 위치 선정 애로, 정박 가능 척수 제한, 어선과의 충돌사고 발생 우려 등으로 어항 내 설치 반대하며, 어항 외측에 별도 항만 구축의견 제시하였나, 별도의 항만을 구축할 경우에는 사업비가 과도하게 책정되어 자체예산을 통한 추진에 어려움이 있으며, 마리나항 기본계획 반영을 위한 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장이 불가피할 것으로 판단됨.