사천시립도서관 건립

관리번호		4-5		주관부서		평생학습센터(도서관지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			30

◦ 항공산업인구 증가와 대규모 택지개발에 따른 공공도서관 수요 대비

◦ 최적의 독서문화서비스 제공을 위한 시(市)직영 공공도서관 신축

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 정동면 예수리 552-2번지 일원(반룡공원부지 내)

◦ 사업기간: 2019년~2023년

◦ 사 업 량

- 건립규모: 대지면적 7,019㎡, 연면적 5,308㎡(지상4층)

- 주요시설: 자료실, 다목적홀, 북카페, 전시공간, 강의실 등

◦ 사 업 비(투자계획): 19,192백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	19,192	588		30	2,238	4,569	11,767
국 비	7,162				895	1,869	4,398
도 비
시 비	12,030	588		30	1,343	2,700	7,369
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	80%	90%	100%
시립도서관 건립	계획수립	타당성용역 예산확보	설계공모	실시설계 공사착공	공사준공 개관준비	개관

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  9.: 정책토론회 개최

◦ 2018. 10.: 건립 및 운영 기본계획 수립

◦ 2019.  1.~4.: 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

◦ 2019.  2.: 전문가 의견 수렴 및 주민설문조사

◦ 2019.  3.: 의회보고, 문체부 타당성 검토 결과 통보(적정)

◦ 2019.  4.: 문체부 균특 예산 신청 및 경남도 지방재정투자 심사 의뢰

◦ 2019.  6.: 공유재산관리계획(변경) 심의 의결

◦ 2019.  6.: 경남도 지방재정 투자심사승인(조건부)

◦ 2019.  8.~9.: 국가공공건축지원센터 사업계획 사전검토 신청 및 의견 수렴

◦ 2019. 10.: 사천시립도서관 운영 기본계획(안) 수립

◦ 2019. 11.: 지질조사용역 완료

◦ 2020.  5.: 2020년 국고보조금(균특) 교부[895백만 원]

◦ 2020.  9.: 설계 공모 당선작 선정

◦ 2020. 10.: 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 개최

◦ 2020. 11.: 사천시립도서관 건립사업 교통성 검토용역 시행

◦ 2020. 12.: 2021년 경남도 균특 예산 확정 통지[1,869백만 원]

◦ 2021.  1.: 사천시립도서관 건립사업 교통성 검토용역 준공

사천시립도서관 소규모지하안전영향평가 용역 시행

◦ 2021.  2.: 사천시립도서관 건립공사 소규모지하안전영향평가 지반조사 용역 시행

◦ 2021.  2.: 사천시립도서관 건립공사 기본 및 실시설계 중간용역 보고회 개최

◦ 2021.  3.: 사천시립도서관 건립 공사 시의회 간담회 개최

◦ 2021.  3.: 사천시립도서관 건립 공사 중간 설계 홍보 동영상 게시(시홈페이지, 공식 SNS)

◦ 2021.  5.: 사천시립도서관 진입도로 확장공사 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행

◦ 2021.  6.: 제6회 경상남도 지방건설기술심의위원회 심의

□ 향후 추진계획

◦ 2021.  7.~10.: 기본 및 실시설계 용역 최종보고회, 설계의 경제성 검토 용역

준공 및 각종 예비인증, 일상감사, 계약심사

◦ 2021. 10. ~ 2023. 4.: 착공 및 준공

◦ 2023.  6.: 개관