용두공원 야간명소화 사업

관리번호		5-4		주관부서		녹지공원과(녹지팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				◯			55

◦ 용두공원 내 시설물 및 공휴지를 활용한 조명시설 설치로 공원이용객의 편의

증대는 물론 만남의 장소 제공을 위한 야간경관 개선

◦ 산책로 등 기존 시설물을 정비하여 주․야간 이용시민의 보행 안전 확보

□ 사업개요

◦ 위    치: 용두공원(용강동 355번지 일원)

◦ 사업기간: 2018년~2021년

◦ 사 업 량: 야간 명소화 조성 1식

◦ 사업내용: 야간조명 설치(목교 및 장미원 LED) 3개소,산책로 탄성포장 정비 900m

◦ 사 업 비(투자계획): 226백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	226	36	40	50		100
시 비	226	36	40	50		100

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022. 6월	임기후
추진율(누계)	10%	45%		100%
용두공원 야간조명 설치	3개소 조명 설치			4개소 조명 설치
용두공원 탄성포장 정비		공사 착공 및 준공(900m)

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017. 5.: 용두공원 풍차 조명 설치(36백만 원)

◦ 2018. 7.~ 9.: 용두공원 목교(3개소) 조명 설치(40백만 원)

◦ 2019. 2.~ 3.: 와룡저수지 주변 산책로 정비(탄성포장 50백만 원)

◦ 2020. 2.: 2020년 1회 추경 예산 요구(미반영)

◦ 2020. 5.: 2021년 주민참여예산 도민제안사업 신청(매칭 50%)

◦ 2020. 9.: 2021년 당초예산요구(미반영)

◦ 2021. 5.: 2021년 추경예산 편성(100백만원)

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 7. ~ 8.: 실시설계용역 착공 및 준공

◦ 2021. 9. ~ 10.: 용두공원 야간명소화 사업 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 야간 조명 설치로 인한 수목 생육환경 저해 우려

→ 데크 등 시설물에 설치하여 수목 생육 저해 최소화