삼천포 구 역사주변 택지분양 및 공동주택 건립

관리번호		6-23		주관부서		도시재생과(균형발전팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			20

◦ 삼천포 구 역사부지의 계획적이고 체계적인 개발을 통해 토지의 이용효율

증대와 난개발 방지로 상업 중심지의 이미지 제고

◦ 기반시설 확충 및 상업부지 개발을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 동금동 151-5번지 일원

◦ 사업기간: 2016년~2022년

◦ 사 업 량: 주상복합(아파트)신축 및 1호광장 조성(A=25,374㎡)

◦ 사업내용: 택지분양 및 공동주택 건립

◦ 사 업 비(투자계획): 9,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	9,000	8,572	400	28
국 비
도 비
시 비	9,000	8,572	400	28
민자 등

단위사업	2018년 이전	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
추진율(누계)	20%	20%	20%	85%	100%
대지조성사업 행정절차 이행	대지조성사업승인 실시계획인가
분양 및 사업자 선정		잠정유보	잠정유보	공모 재추진 공사 착공	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2016.  9.  9.: 대지조성사업 승인․고시

◦ 2017.  1. 25.: 도유재산 9필지(9,310㎡) 매입완료

◦ 2017.  7. 28.: 국유지(40필지) 매입 완료

◦ 2017. 12. 22.: 토지수용 완료(6필지 1,368㎡)

◦ 2017. 12. 29.: 분양공고문 공고(2017.12.29.~2018.2.27.)

◦ 2018.  1.  5.: 사업설명회 개최

◦ 2018.  1. 15.: 조성원가 산정, 분양공고문 변경 공고(2018.1.15.~3.16.)

◦ 2018.  1. 26.: 공모참가 의향서 접수

◦ 2018.  3. 16.: 공모사업 계획서 접수(신청자 없음, 유찰)

◦ 2018.  4. 10.: 주요정책토론회 개최(재공고안 심의)

◦ 2018.  4. 18. : 택지분양 및 민간사업자 공모 재공고(2018.4.18.~2018.7.16.)

◦ 2018.  7. 16.: 사업계획서 접수(신청자 없음, 유찰)

◦ 2018.  7. 24.: 민간사업자 미 참여에 따른 사업추진 잠정적 유보(방침 결정)

◦ 2020.  4.: 사유지 내 손실보상금(이사비, 주거이전비 등) 지급

◦ 2020.  9.: 조성원가 재산정 등을 위한 2021년 당초예산 편성

◦ 2021.  3.: 조성원가 재산정 확정

◦ 2021.  3.: 재분양공고문 작성 확정

◦ 2021.  3. 18 ~ 5. 17.: 3차분양공고 실시

◦ 2021.  6.  2.: 민간사업자 선정

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 6. : 사업계약 체결