생활체육시설 확대 조성 및 정비

관리번호		1-11		주관부서		문화체육과(체육시설팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			35

◦ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

◦ 체육시설을 이용하는 이용객들의 편의를 제공하기 위한 시설 정비

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 관내(사남면, 용현면, 곤양면, 서포면)

◦ 사업기간: 2018년~2024년

◦ 사 업 량: 생활체육시설 조성

◦ 사업내용: 축구장, 풋살장, 족구장, 소규모 운동장 등 조성

◦ 사 업 비(투자계획): 26,080백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	26,080	2,850	105	1,840	1,167	3,400	2,080	14,638
국 비	3,330	350						2,980
도 비
시 비	22,750	2,500	105	1,840	1,167	3,400	2,080	11,658
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	50%	70%	100%
사남 생활체육시설 조성				부지선정 행정절차이행	부지보상	공사 준공
용현 생활체육시설 조성	실시설계	부지보상	부지보상, 문화재시굴조사	부지보상	공사착공	공사준공
곤양 생활체육시설 정비		부지보상	공사준공
서포 생활체육시설 조성	부지선정	관리계획결정 등 행정절차이행	관리계획결정	부지보상	실시설계 실시계획인가고시	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 용현 생활체육시설 조성

- 2017. 12.: 설계용역 시행

- 2018.  4.: 문화재지표조사·지질조사용역 완료

- 2018.  5.: 주민설명회 개최

- 2018.  9.: 용역 중간보고회, 실시계획인가 신청

- 2018. 10.: 공유재산관리계획 반영

- 2019.  1.: 농업진흥구역 해제 신청

- 2019.  3.: 도 지방재정 투자심의 조건부 가결, 토지보상계획 공고

- 2019.  5.: 도시계획시설 결정

- 2019.  7.: 감정평가 실시(1차분)

- 2019. 12.: 설계용역 완료

- 2020.  3.: 실시계획 인가

- 2020.  8.: 문화재 시굴조사 완료

- 2021.  1.: 감정평가 실시(2차분)

- 2021.  3.: 보상 실시

◦ 곤양 생활체육시설 정비

- 2019.  7.: 실시설계용역 시행

- 2019. 12.: 토지보상 완료

- 2020.  3.: 공사 착공

- 2020.  8.: 공사 준공

◦ 서포 생활체육시설 조성

- 2020.  2.: 도시관리계획 결정용역 시행

- 2020.  6.: 도시관리계획 결정용역 완료

- 2020.  6.: 재해영향검토 완료

- 2020. 11.: 도시계획 시설 결정 심의 가결

- 2021.  2.: 감정평가 실시

- 2021.  3.: 손실보상 협의 추진

- 2021.  9.: 토지보상 완료

□ 향후 추진계획

◦ 용현 생활체육시설 조성

- 2022.  5.: 토지보상 완료

- 2022.  6.: 공사 착공

- 2023. 12.: 공사 준공

◦ 서포 생활체육시설 조성

- 2022.  3.: 실시설계용역 및 실시계획인가 고시

- 2022.  7.: 공사 착공

- 2023.  5.: 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 토지보상비 등 사업추진을 위한 예산확보 애로