사천항공산업대교 건설

관리번호		2-3		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			35

◦ 산업단지 클러스터 구축을 위한 연계도로 개설 및 기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치: 곤양면 검정리~사남면 방지리

◦ 사업기간: 2017년~2025년

◦ 사 업 량: 교량건설 L=0.85㎞

◦ 사업내용: 교량건설

◦ 사 업 비(투자계획): 49,770백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	49,770	500		370	1,400	20,000	20,000	7,500
국 비	49,200			300	1,400	20,000	20,000	7,500
도 비	300	300
시 비	270	200		70

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	40%	50%	100%
항공산업대교 건설	기본구상 용역	타당성조사 및 지질조사	실시설계	보상 및 착공	공사	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2014.  1.: 제2사천대교 조기건설 건의(경상남도)

◦ 2017.  3.: 제2사천대교 사업추진 건의(경상남도)

◦ 2018. 11.: 기본구상용역준공

◦ 2018. 11.~: 사천항공산업대교 추진 관련 관계기관 업무협의 40여회

◦ 2018. 12.: 타당성조사 용역비 국비3억원 확보

◦ 2019.  3.~6.: 항공산업대교 지질조사 용역 시행(사천시)

◦ 2019.  5.~10.: 타당성 검증 용역 시행(부산지방국토관리청)

◦ 2019.  8.: 2020년 예산 신청(부산청→국토부→기재부)

◦ 2019. 12.: 2020년 예산 반영(국비 14억 원)

◦ 2020.  3.: 실시설계용역 PQ

◦ 2020.  5.: 실시설계 착수

◦ 2020.  7.: 실시설계 착수 보고회 개최(부산지방국토관리청)

◦ 2020. 12.: 주민설명회 개최

◦ 2021.  4.: 국토교통부(산업입지정책과) 방문 건의(사업추진 건의)

◦ 2021.  6.: 부산국토관리청(도로계획과) 방문 건의(사업추진 건의)

◦ 2021.  8.: 국회의원회관 방문 건의(하영제 국회의원 보좌관)

◦ 2021.  9.: 항공국가산업단지계획 변경 협의(진입도로 포함)-LH추진

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 11월: 실시설계 준공 및 행정절차 이행

◦ 2021.~2025.: 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 대규모 사업비 소요에 따른 예산 확보 애로

→ 관계기관 지속 협의 사업조기 착수 노력