송포 도시첨단산업단지의 조성 및 MICE산업 육성

관리번호		2-7		주관부서		산업입지과(산단조성팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			20

◦ 해양․항공산업 관련 인프라 조성

◦ 항공, 해양분야 등 전략산업 인프라와 문화, 관광, 레저, 교육 등을 연계하여 고부가가치 MICE산업으로 육성

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 송포·노룡동 앞 공유수면 일원

◦ 사업기간: 2018년~2024년

◦ 사업내용: 657,092㎡

- 경량항공기 생산·연구 및 교육·훈련단지 조성

- 첨단부품소재 산업단지 조성

- 위그선·수상비행기 R&D센터 구축, 이착륙장 L=1.2km  B=60m

- 호텔·컨벤션센터·상업 및 업무 등 복합타운 조성

- 해양·항공 레저 및 체험단지 조성

◦ 사 업 비(투자계획): 162,900백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	162,990	200	4,000				47,803	110,987
국 비	4,600							4,600
도 비
시 비	63,355	200	4,000				19,121	40,034
지방채	95,035						28,682	66,353

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	40%	50%	60%	100%
단지계획수립 고시	타당성 조사	투자심사	투자심사	투자심사(재심사)	산업단지계획 용역 추진
공사착공					보상협의 공사착공	공사준공

□ 추진실적

◦ 2014.  7.: 민선6기 시장 공약사업

◦ 2016.  4. 28.: 송포 산단 일원 사천시 제2차 연안관리지역계획 고시

◦ 2016. 11. 28.: 항공레저 이착륙장 후보지 확정(국토부 항공정책과)

◦ 2017.  1. 26.: 2017년 산업단지 지정계획 고시(경남도 고시2017-26호)

◦ 2017.  2.  1.: 양해각서 체결[아론비행선박(주)]

◦ 2017.  5. 29.: 2017년 제3차 지방재정 투자사업 타당성 조사 의뢰

◦ 2017.  7. 12.: 양해각서 체결[(주)베셀]

◦ 2018.  8. 12.: 지방재정투자사업 심사 타당성 조사 완료

◦ 2018. 11.  9.: 지방재정 투자심사(행정안전부) - 재검토

◦ 2018. 12. 13.: 공유수면매립 협의(해양수산부 연안계획과)

◦ 2019.  1. 15.: 2019년 제1차 지방재정 중앙 투자심사 의뢰(행정안전부)

◦ 2019.  4.  1.: 지방재정 투자심사(행정안전부) - 재검토

◦ 2020.  8. 12.: 경남개발공사와 양해각서 체결

◦ 2020.  8. 18.: 타당성조사 의뢰

◦ 2021.  5. 28.: 2021년 제2차 지방재정중앙투자심사(재검토)

□ 향후 추진계획

◦ 2022.  6.: 지방재정중앙투자심사 의뢰(행정안전부)

◦ 2023.  6.: 산업단지계획 수립 승인 고시

◦ 2023.  7. ~ 2024. 12.: 공사시행 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 지방재정투자심사 결과에 따라 사업추진 여부 결정

→ 지방재정투자심사 통과 집중 노력