서포 굴 특화거리 조성

관리번호		3-1		주관부서		해양수산과(수산행정팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			60

◦ 서포 비토 굴구이를 활용한 굴 유통 및 신성장 상권 구축 등 어민 소득원 재창출

◦ 해안변 무질서 행위(불법 건축물, 무신고 영업) 근절과 제도권 유입을 통한

지역경제 활성화로 청정해역 보존

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 서포면 비토리 30-6번지 일원

◦ 사업기간: 2018.~2022.

◦ 사 업 량: 사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성 1식(3단지)

◦ 사업내용: 가공판매 및 처리시설 등(5,987㎡)

◦ 사 업 비(투자계획): 1,679백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	1,679	-	179	300	400	800	-	-
국 비	750	-	-	150	-	-	-	-
도 비	225	-	-	45	260	520	-	-
시 비	704	-	179	105	140	280	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	60%	80%	100%	-
사업(예산) 도입운영	계획수립 예산확보	조례제정 운영(시행)	운영(시행) 중간평가	운영(시행)	운영(시행) 최종평가	-
수산경쟁력 강화	실시설계 용역	공사착·준공	공사착·준공	공사착·준공	공사 착·준공	-
사업확충 강화 등	계획수립	1개소	1개소	1개소	1개소	-

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018. 1.: 서포 비토 해안변 굴구이 양성화 대책 수립

- 불법 굴구이 업소(8개소) 및 굴 박신장(10개소) 적발

- 행정질서 회복을 위해 지도 단속 후 개발계획 수립 시행

◦ 2018. 3.: 사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성사업 신청 및 확정(경남도)

- 2019년 지특 사업비 300백만원(국비 150, 도비 45, 시비 105)

◦ 2018. 4.: 국유재산 분할 측량 용도폐지(비토리 259-4/실제사용 운동장)

◦ 2018. 4.: 실시설계 용역비 추경 확보(20백만원)

◦ 2018. 5.: 실시설계 용역 착공(오투건축사/14,832천원/5.17.~7.15.)

◦ 2018. 6. 14.: 경계측량 실시 의뢰

◦ 2018. 7. 4.: 측량기간 소요 등으로 설계용역기한 연장(8.14.까지)

◦ 2018. 8. 14.: 실시설계 용역 준공(공사비 350백만원)

- 1단지(165㎡) 계획 : 2종 근린생활시설(일반음식점) 4동, 화장실 1동

◦ 2018. 10. 20.: 국유지 매수신청(한국자산관리공사 경남지역본부)

- 2018년 매각 수입목표 초과로 2019년 초에 매각예정 공문 통보

◦ 2019. 1. 10.: 국유지 매수신청(한국자산관리공사 경남지역본부)

- 2019년 국유지 매각·매수관련 계획수립을 위한 매수신청

◦ 2019. 3. 18.: 1단지 공사착공

◦ 2019. 3. 26.: 공사 일시중지 시행

- 사업구역내(비토 분교) 비토빌 체험학교 관리 운영과 연계한 민원발생

◦ 2019. 5. 24.: 공사 재개

◦ 2019. 8.: 현장 실정보고에 따른 설계변경 및 공기연장(준공기한 9.5.까지)

◦ 2019. 9.: 1단지 공사 준공

◦ 2019. 12.: 건축물대장 등재 및 보존등기

◦ 2020. 01.: 1단지 운영방안 검토

◦ 2020. 03.~05.: 2단지 사업추진 관련 협의 및 주민설명회

◦ 2020. 06.~07.: 2단지 실시설계 착·준공

◦ 2020. 10.: 2단지 공사업체 선정 및 착공

◦ 2021. 02.: 2단지 공사 준공

◦ 2021. 05.: 2단지 건축물대장 등재 및 보존등기

◦ 2021. 06.: 운영 조례안 제정

◦ 2021. 07.: 3단지 기본 및 실시설계 착공

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 11.: 3단지 기본 및 실시계획 준공

◦ 2022. 03.: 3단지 공사 착공

◦ 2022. 07.: 3단지 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦없음