삼천포 도시재생사업 확대

관리번호		3-15		주관부서		도시재생과(재생지원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			40

◦ 도시재생공모사업을 통하여 자생적 성장기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고

하며, 지역 공동체를 회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 대방동 대방마을, 활성화 지구 내

◦ 사업기간: 2019년~2022년

◦ 사 업 량

- 주거지지원형 사업 1식(대방마을)

- 도시재생사업 신규 신청

◦ 사업내용

대방마을(2018년 선정)	도시재생뉴딜사업 신규 신청
A-1 자율주택정비사업 A-2 생활 인프라 개선사업 B-1 굴항공간 재생사업 B-2 해안공원 조성사업 C-1 공유경제 플랫폼 조성사업 C-2 대방 모두자리 조성사업 C-3 주민소규모 창업공간 지원 D-1 복합커뮤니티 센터 조성사업 D-2 주민제안 공모 및 주민역량 강화사업	◦ 도시재생 공모사업 지속 신청

◦ 사 업 비(투자계획): 15,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	15,000			1,281	6,039	3,400	4,280
국 비	9,000			1,251	3,141	2,040	2,568
도 비	1,800			0	878	408	514
시 비	4,200			30	2,020	952	1,198
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	90%	100%
큰고을 대방 굴항 도시재생사업	공모사업선정	활성화계획 승인, 실시설계, 사업시행	실시설계 사업시행	실시설계 사업시행 운영	사업시행	사업준공 운영
도시재생사업 신규 신청		선구·동서금동 도시 재생뉴딜 미선정	소규모 재생 사업 신청

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

〈큰고을 대방 굴항 도시재생사업〉

◦ 2018.  8. 31.: ’18년 도시재생 뉴딜 공모사업『큰고을 大芳굴항(주거지지원형)』선정

◦ 2018. 10. 17.: 선도지역(주거지지원형) 지정을 위한 공청회 개최

◦ 2018. 12. 26.: 도시재생 선도지역(주거지지원형) 지정 고시

◦ 2019.  1. 23.: 활성화계획(주거지지원형) 수립을 위한 주민설명회 개최

◦ 2019.  2. 14.: 도시재생활성화계획(주거지지원형)에 대한 지방위원회심의

◦ 2019.  7. 10.: 활성화계획(안), 실현가능성 및 타당성평가 요청

◦ 2019.  9. 24.: 활성화계획 승인(국토부→사천시)

◦ 2019. 11월말: 복합커뮤니티센터, 대방모두자리 보상 및 설계용역 발주

◦ 2020.  2.  6.: 도시관리계획 결정(변경) 승인 고시

◦ 2020. 05. 29.: 클린하우스 설치 부지 수목정비공사 준공

◦ 2020. 09월 초: 생활인프라 CCTV, 가로등, 소화전 설치공사 착공

◦ 2020. 09. 14.: 클린하우스 설치

◦ 2020. 10월 말: 대방모두자리 신축공사 착공

◦ 2020. 11월 초: 복합커뮤니티센터 신축공사 착공

◦ 2021. 2월 : 도시관리계획 결정(문화시설) 승인 고시

◦ 2021. 2월 : 문화시설 부지 보상계획 공고 및 감정평가 실시

◦ 2021. 2.  1.: 클린하우스 관리자 근로계약 체결 및 운영

◦ 2021. 3월 : 대방모두자리 신축공사 부지 재감정 실시 및 보상협의

◦ 2021. 3월 : 굴항공간재생사업 지장가옥 철거공사 착공 및 준공

◦ 2021. 3월 : 생활인프라개선사업 생활도로개설 실시설계 용역 착수

◦ 2021. 4월 : 굴항공간재생사업 설계 용역 착수

◦ 2021. 5월 : 대방모두자리, 복합커뮤니티센터 신축공사 재개

◦ 2021. 6월 : 생활인프라개선사업 바닥페이빙(주도로) 완료

◦ 2021. 7월 : 굴항 공간재생사업 실시설계 용역 완료

◦ 2021. 8월 : 복합커뮤니티 센터 조성 부지 지장가옥 철거공사 착공

◦ 2021. 9월 : 생활인프라 개선사업 클린하우스 설치

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 10.: 생활인프라 개선(생활도로 개설) 공사 착공

◦ 2021. 10.: 복합커뮤니티센터, 대방모두자리 신축공사 준공

◦ 2022. 12.: 사업완료