사천만 갯벌해양생태 환상형 자전거도로 개설

관리번호		5-15		주관부서		도로과(농어촌도로팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			60

◦ 해변도로를 시민과 관광객이 함께하는 테마형 자전거 명품도로 구축

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 관내

◦ 사업기간: 2019년~2025년

◦ 사업내용: 자전거도로 개설 및 지정 L=90km

◦ 사 업 비(사업계획): 3,011백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	3,000				600	420	780	1,200
국도비	0							-
시 비	3,000				600	420	780	1,200

※ 사천시 둘레길(탐방로 정비) 조성사업 등과 연계하여 국․도비 확보

단위사업	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	50%	100%
자전거도로 개설		전구간 기본계획 뚝방길구간 실시설계 뚝방길구간 공사착공	실시설계 (정비필요구간)	뚝방길 구간공사착공 정비필요구간 공사착공	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018. 10.: 현장 확인

◦ 2019. 10.: 공모사업 선정(L=5.6km)

- 뚝방길 녹색탐방로 조성구간(서포~곤양): 국도비포함 18억원 확보

◦ 2020.  9.: 기본계획용역 준공(L=90km구간), 뚝방길 녹색탐방로 실시설계 준공(L=5.6km)

◦ 2020. 12.: 뚝방길 녹색탐방로 공사착공(2020년분)

◦ 2021.  7.: 뚝방길 녹색탐방로 공사착공(2021년분)

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 12.: 뚝방길 녹색탐방로 조성사업(2020년분, 2021년분) 준공, 공사착공(정비필요 구간)

◦ 2025. 12.: 공사 준공(정비필요구간)

□ 문제점 및 대책

◦ 사업비 과다로 예산 확보 애로

→ 사천시 녹색탐방로 조성사업 등 다른 사업과 연계하여 국도비 확보

※ 19.10.: 뚝방길 녹색탐방로 조성사업 공모사업 사업확정(L=5.6km/18억 원)