국도3호선~금문해안도로간 연결도로 개설

관리번호		6-14		주관부서		도시과(도시계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			50

◦ 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급

◦ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 용현면 금문리 일원

◦ 사업기간: 2015년~2022년

◦ 사 업 량: L=896m, B=25m→15m~25m

◦ 사업내용: 연결도로 개설 L=896m, 25m→15m~25m

◦ 사 업 비(투자계획): 7,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	7,000	1,550	500	500	600	833	2,000	1,017
도 비	750	750
시 비	6,250	800	500	500	600	833	2,000	1,017

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	29%	36%	65%	79%	94%	100%
도로 신설	토지보상	토지보상	토지보상 및 공사 (1차구간)	토지보상 (잔여구간)	토지보상 (잔여구간)	공사시행 및 준공 (잔여구간)

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2013. 11.: 투자심사

◦ 2015.  9.: 손실보상협의(1차구간 : 국도3호선~금문마을방향 L=150m)

◦ 2017.  4. : 손실보상 재산정 (토지 5, 지장물 3, 594백만 원)

◦ 2017.  6.~2018.  2.: 지장가옥(11동) 철거

◦ 2018.  1.~2019.  9.: 보상 협의(2필지/ 5필지, 168백만 원/ 594백만 원)

◦ 2019.  2.: 시의회 5분 자유발언 및 주민건의 등에 따라 노선폭원축소 검토보고

◦ 2019.  9.: 폭원축소 계획 수립(B=25m→15m)

◦ 2019. 12.: 공사착공(1차구간, L=150m B=25m)

◦ 2020.  6.: 1차구간 편입토지 보상 및 지장가옥 철거 완료

◦ 2020. 12.: 공사준공(1차구간, L=150m B=25m)

◦ 2021.  1.~ 6.: 2차구간 일부 보상 협의(8필지/9필지, 652백만 원/753백만 원)

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 1.~2022. 12.: 편입토지 및 지장물 보상

◦ 2023. 1.~2023. 12.: 잔여구간(L=746m) 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 많은 사업비 소요로 시 재정 여건상 사업기간 장기화 우려