삼천포시외버스터미널~문화예술회관 도로 확장

관리번호		6-15		주관부서		도시과(도시개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			43

◦ 동지역 시가지를 관통하는 도시계획도로를 확장하여 교통편의 제공

◦ 미집행 도시계획시설 정비를 통한 도시기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 벌리동 일원

◦ 사업기간: 2016년~2022년

◦ 사 업 량: 도로 개설 L=280m, B=20m

◦ 사업내용: 수도교~벌리신호등간 도시계획도로(중로1-12호선) 개설

◦ 사 업 비(투자계획): 8,000백만 원(공사비: 4,000, 보상비: 4,000)

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	8,000	100	300	1,000	2,000	0	2,500	2,100
시 비	8,000	100	300	1,000	2,000	0	2,500	2,100

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	20%	50%	-	80%	100%
편입 토지 및 지장물 보상협의	감정평가 및 보상협의 착수	보상 협의 (계속)	보상 협의 (계속)	-	보상 협의 (완료)
도로 확장				-	공사 착공	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017. 5.: 실시설계 완료

◦ 2018. 1.: 실시계획인가

◦ 2018. 6.: 감정평가 실시 및 보상금 산정

◦ 2018. 9.~2020.12.: 손실보상 협의 착수 및 협의(금2,365,423,490원, 57%)

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 상반기: 손실보상 협의 완료

◦ 2022. 하반기: 공사 착공

◦ 2023. 하반기: 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 2021년 당초예산 미 확보로 사업추진 지연

◦ 잔여지 매수 요구에 따른 보상비 증액으로 사업비 증가

◦ 증액된 사업비 확보 후 보상협의(수용재결), 교량 가설공사 병행 추진